문서번호	시설보수과-1042
결재일자	2018.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장	중랑물재생센터소장

『우이천외 5개 하천 차집관로 정밀조사 용역』

발주계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.03.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『우이천외 4개 하천 차집관로 정밀조사 용역』

발주계획 보고

우리센터에서 시행예정인 『우이천외 5개 하천 차집관로 정밀조사 용역』에   대한 기술용역타당성 심사가 완료되어 아래와 같이 발주, 사업시행에 만전을   기하고자 함.

1		용역개요

□ 용 역 명 : 우이천외 5개 하천 차집관로 정밀조사 용역

□ 용역기간 : 착수일로부터 2018.08.31

□ 용 역 비 : 173,565천원(타당성심사 금액)

□ 용역개요 : 차집관로 L=21,167m(자주식 9,747m, 부유식 11,420m)

2		기술용역 타당성 심사결과

□ 금액심사 : 196,900천원 → 173,565천원(23,335천원 감액)

□ 조정내용 : 세부현황 붙임

3		발주계획

□ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(실적제한)

※ 제한입찰계약 운영요령(행정안전부예규 제344호, 2010.12.30.)

□ 입찰참가자격

- 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제44조에 의한 수치지도제작업과 지하        시설물측량업을 모두 등록한 자로서 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약        체결일)까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 자

- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제6조에 의거하여 중소기업청        고시「증소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준」에 따라 직접생산증명서 [공간정보        데이터베이스 및 시스템 구축(G2B분류번호 81151699)으로 발행된 것으로 유효기간        내에 있어야 함]를 소지하고「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된        중소기업 확인서(유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 업체

- 서울특별시 관내 공공하수도의 CCTV조사(L=6km이상) 및 서울시 하수도관리 전산        시스템에 촬영자료 탑재(DB구축 L=6km이상) 실적(공공기관)이 모두 있는 업체

□ 예산과목

- 중랑물재생센터 공통분야 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비,        수선유지비

4		향후계획

□ 2018.03. : 용역발주 및 계약

□ 2018.04. : 용역착수

□ 2018.08. : 용역준공

붙임 : 용역 타당성 심사결과 1부.    끝.