문서번호	시설보수과-3067
결재일자	2019.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
협조

『우이천 외 6개 하천 차집관로 보강공사 실시설계 용역』

준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『우이천 외 6개 하천 차집관로 보강공사 실시설계 용역』

준공기한 연기 검토 보고

우리센터에서 시행중인 『우이천 외 6개하천 차집관로 보강공사 실시설계용역』의  「건설신기술 활용심의 위원회 심의」 상정에 따른 용역기간 연기 보고 임.

1		용역개요

□ 용 역 명 : 우이천 외 6개 하천 차집관로 보강공사 실시설계용역

□ 용역기간 : 2019.02.27.~2019.05.31.

□ 용 역 사 : ㈜동해종합기술공사 대표 정점래

□ 용 역 비 : 20,691,000원

□ 용역내용 : 가오천, 대동천, 백운천, 성북천, 우이천, 인수천, 화계천, 차집관로 시설물 보수ㆍ보강 공사 실시설계

2		보고내용

□ 『우이천 외 6개하천 차집관로 보강공사 실시설계용역』에 대하여 하수암거 보수공사 특정공법 선정 심사위원회를 개최하여 선정된 공법(신기술 건설714호)에 대하여 건설신기술활용심의 위원회 심의 절차 이행 등에 따른 기간 소요(3주일)로 용역기간 연장 필요.

3		검토결과

□ 차집관로 시설물 보수·보강 공사는 특정공법으로 신기술이 선정되면 이에 따른 건설신기술활용심의 위원회 심의 절차가 이행 된 후 실시설계가 완료되는 사안으로 건설신기술활용 심의 완료시까지 용역 기한을 연기 하고자 함.

4		조치의견

□ 『건설신기술활용심의 위원회 심의』 절차 이행을 위하여 용역기간 준공 기한을 아래와 같이 연기하고자 함.

- 준공기한 연기

• 당초 : 2019.02.27.~2019.05.31.

• 변경 : 2019.02.27.~2019.06.24.

- 연기사유 : 건설신기술활용심의위원회 심의회 상정에 따른 용역기간 연장.

- 지체상금부과 여부 : 미부과  끝.