우이-신설 도시철도 정보통신분야 월간 공정회의(1월) 결과

Ⅰ						개 요

□ 회의개요

▣ 일  시 : 2016. 01. 27(수) 14:00 ~ 16:00

▣ 장  소 : 포스코ICT 회의실

▣ 안  건

○1월 추진실적 및 2월 추진계획

○2016년 주요업무 추진계획 등

▣ 참석자 : 13명

○본부(4명), 시스템 감리단(4명), 시공사(3명), SPC 및 삼원 에프에이(2명)

Ⅱ						추진내용

▣ 우선시운전구간(차량기지~L05) 통신기계실 전기 수전 완료

▣ 본선터널 우선시운전구간 열차무선용 누설동축케이블 콘넥터작업 완료

▣ 열차무선기지국(차량기지,L03) 프로그랜 셋업 완료

▣ 열차무선(휴대용, 공정용, 차량용 무전기) 프로그램 보안키 작업(국민안전처 협의       입력 완료 / 01.14)

▣ 열차무선 통화로 연동을 위한 주전송설비(차령기지, L03) 셋업 완료

▣ 자동요금징수설비(AFC) 교통카드 단말기 S/W 및  운영 어플리케이션 S/W 85%공정 완료

Ⅲ						회의결과

▣ 2016년 11월말 완공 목표로 모든 정보통신 및 AFC 설비 현장 설치시험 완료

▣ 2016년 3월말 통신기계실(전구간) 통신설비 설치 완료

Ⅳ						지시사항

▣ 각 정거장 통신기계실내 장비 반입에 따른 장비 도난 및 안전 보관을 위해 시건장치   등 특별 관리요함

▣ 자동요금징수설비(AFC)는 후속 공정으로 시스템 완성도 확인 기간이 절대적으        로 부족하므로 사전에 S/W 개발 상황 등을 개발사(KSCC) 방문하여 진행 공정을       주기적인 협업을 통해 구축 공정 지연되는 일이 없도록 하여 주길 바람

▣ 우이-신설 전구간 정거장 및 본선 휴대전화서비스를 위한 이동통신중계설비 설치를       위하여 우이신설경전철(주)(SPC)는 이동통신사(3사)와 조속히 협약체결하여 2016년       11월 이전 적기 지하중계설비를 설치할 수 있도록 업무 추진 바람

▣ 우이신설경전철(주)는 우이-신설노선의 수도권운영기관간 교통카드 통합환승연계 운영을       위하여 타 운영기관간 연락운송협약을 조속히 체결하여 타 운영기관에서 우이 신설       노선의 교통카드 운임정보가 반영된 S/W를 개발 추진될 수 있도록 업무 추진 요함

▣ 우이신설경전철(주)는 관계법령에 근거한 우이-신설구간에 DMB 방송 서비스가        가능하도록 지하방송수신설비를 적기 구축하여 주기바람

Ⅴ						향후계획

▣ ’16. 02. 05 : 우선시운전구간 본선 열차무선통신용 누설동축케이블(RCX) 누설       전계강도특성시험 완료

▣ ’16. 02. 29 : 본선터널 전구간 광케이블 등 전체 통신설비 설치완료

▣ ’16. 02. 29 : 열차무선통화 서비스 개시 및 우선시운전을 위한 시운전종사자        휴대무전기 지급

▣ ’16. 03. 31 : 기지 등 13개 전역사 통신기계실내 통신설비 설치완료

▣ ’16. 04. 30 : 본선(L06~L13)구간 열차무선 통화서비스 개시

▣ ’16. 05월중 : 개집표기 등 AFC 설비 사전 샘플시공(신설동역) S/W 확인/          SPC와 협의 세부 일정 추진

▣ ’16. 05. 31 : 열차무선설비 무선국 준공검사(전파관리소)

▣ ’16. 09. 30 : 열차무선 통합망 연동 및 통신설비 사용전 검사

▣ ’16. 11. 30 : 통신설비 자가통신망 준공검사