문서번호	정수시설과-7139
결재일자	2019.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
협 조
	행정관리과장
	정수과장

『월드컵대교 건설』에 따른

T.F팀 및 공정회의 개최 결과 보고

2019. 7.

영등포아리수정수센터

정수시설과

월드컵대교 건설에 따른 T.F팀 및 공정회의 개최 결과 보고

□ 회의 개요

○ 일시 : 2019. 7. 30(화) 14:00 ~ 15:00

○ 장소 : 센터 회의실

○ 참석자 : 센  터 : 정수시설과장외 직원 6명

시공사 : 감리단장,현장소장외 2명

○ 회의안건

1) 2019. 8월에 센터내 진행할 공정 설명

2) 공정 대한 센터 의견 제시

3) 그간 추진해온 공사에 대한 센터 간섭사항 의견 제시 등

□ 주요내용(요약)

【센터】

○ 해충방지를 위해 침전지 영구덮개를 밀폐형(창문포함)으로 설계 및 설계자가 현장 여건을 충분히 확인할 수있도록 지원 요청

○ 쥐산 암사변보강공사 관리 철저 및 정리작업에 따른 공업용수 시설 안전대책 강구후 시공 요청

○ 액화산소탱크 인접 공사 시 임시보호시설(비계 및 부직포) 설치 및 근로자 특별 안전교육 요청

【시공사 기타사항】

○.암사면 보강구간 공사수행계획 수립 중

○.고층전용철거장비(U.H.D) 사용하여 암사면 일부제거, 톤마대 ,PE방호벽을 통해 보호구역 설정

○.전체 공기 준수를 위해 도수관로와 간섭되는 MP16 교각을 문형식으로 시공하고 도수관로는 구조물 시공 완료후 이설 추진

○.19년 8울 말 이후 구조물 본공사 투입 예정(공사1,2구역 등)

○.다목적관리동에 인입되는 도시가스관 단전가능여부 및 대체 방안 별도 협의 예정

○.안전확보를 위해 통행시 우회도로 사용(암사면 인접구간 접근 지양)

○.공사1구역 침전지 북측 교각(MP15)와 강변북로측 옹벽 간섭시 일부 옹벽 철거 필요

○.공사2구역 등 공사구간 내 가로등 협의 후 철거

○.도수관로 이설 가시설(침전지 남측) 매립 예정

□ 조치자 의견 및 향후계획

○ 8월 공정에 대한 준수 여부 확인.

○ 9월 공정에 대한 T.F팀 회의 개최 .

○ 공정회의 사항을 감리단 및 시공사에 공문발송. 끝