문서번호	시설관리과-1598
결재일자	2019.6.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
협 조
	총무과장
	주무관
	주무관

『잠원 한강공원 노후 보행로 정비공사』

설계변경 시행 보고

2019. 06.

한강사업본부

(시설관리과)

『잠원 한강공원 노후 보행로 정비공사』

설계변경 시행 보고

「잠원 한강공원 노후 보행로 정비공사」 시행 중 보행로 옆 배수로 정비(본부장지시사항) 및 공종별 물량 증․감에 따라 설계변경을 시행하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 잠원 한강공원 노후 보행로 정비공사

□ 위    치 : 잠원공원 내

□ 사업기간 : 2019. 3. 18. ~ 2019. 09. 13.

□ 규    모

○ 경계석 설치 3,780m, 흙콘크리트 포장 4,158㎡, 흄관부설 400m

□  총 사업비 : 744,779천원

○ 도급비 358,579천원, 관급비 314,800천원, 이전비 71,400천원

□ 시 공 사 : 대부건설(주)  대표 정은미

Ⅱ		변경 사유 및 현황

□ 변경 사유

○ 배수로 정비 현안 사항 보고(시설관리과-1142)

- 본부장 차담회(2019.3.11.)시 본부장 지시사항 : 집수정 주변 정리를

“잠원 한강공원 노후 보행로 정비공사”에서 시행

- 소요예산 : 70백만원(낙찰잔액 55백만원 사용)

○ 현안 사항 보고(시설관리과-1238)

- 우수관 CCTV 촬영 및 플륨관 정비

- 소요예산 : 37백만원

○ 현안 사항 보고(시설관리과-1542)

- 노후 볼라드 정비 및 저수호안 계단 설치

- 소요예산 : 55백만원

○ 기타 수량 증․감 및 신규 공종 발생 등

□ 물량 증․감 사항

공 종	단 위	물량			비 고
		당초	변경	증․감
플륨관 설치	m	-	418	증)418
흄관 부설	m	400	-	감)400
소형고압블록 포장	a	-	5.5	증)5.5
볼라드 설치	개	-	17	증)17
디자인울타리	m	100	462	증)362

□ 설계변경 금액

구 분	당 초	변경	증․감	비 고
총공사비	744,779,000	800,000,000	증)55,221,000
도 급 비	358,579,000	430,826,800	증)72,247,800
관 급 비	314,800,000	351,518,400	증)36,718,400
이 설 비	71,400,000	17,654,800	감)53,745,200

Ⅲ		조 치 계 획

□ 상기와 같은 내용으로 설계변경하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 현안 사항 보고서 3부.  끝.