문서번호	도시철도토목부-6924
결재일자	2016.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목3과장	도시철도토목부장
협조
	주무관

『하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사』

도시가스 관종변경 설치 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6

도기시반시설본부

도시철도토목부

『하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사』

도시가스 관종변경 설치 검토 보고

본공사 구간중 가톨릭노유자시설로 인입된 도시가스관을 매달기 하기 위해서는 현재 매설된 도시가스관의 관종을 변경(PE관→PLP관)요청이 있어 검토 보고함.

Ⅰ		관련근거

○ 대한(하남) 제16-233호(2016.4.29) : 입출고선 입시배수로 설계누락에 따른 실정보고

○ 도시가스 사업법 시행규칙(별표5) : 가스용 폴리에틸렌관은 노출배관으로 사용하지 아니할 것.

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사

○ 위    치 : 서울시 강동구 강일동 일원(동광교회~서울시계)

○ 규    모 : 총 연장 1,819m

- 본    선 : 471m (개착박스, 환기구 1개소)

- 입출고선 : 1,348m

○ 도 급 비 : 38,616백만원

○ 공사기간 : '15.03.30 ～ '18.07.26

○ 시 공 사 : 쌍용건설(주)

○ 건설사업관리 : ㈜대한콘설탄트 외 2개사

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

□ 보고내용

○ 본선구간의 가톨릭노유자시설 횡단부에 매설된 도시가스관이 토공굴착으로 인하여 노출됨에 따라 가스관 보호 및 유지관리을 위하여 관종변경{PI(160A)→PLP(150A), L=20M}요청사항에 대한 적정성 여부를 검토.

○ 위치도

○ 가스배관 관종 변종 현황도

□ 관종변경에 따른 이설비 현황                        (단위 : 천원)

공사명	규모	예상공사비	비 고
강동구 강일동 697노유자시설 관종변경 (PE→PLP)공사	PLP 150A-20m	18,785	VAT별도

□ 건설사업관리단 검토 의견

○ 본선구간 가톨릭 노유자시설 횡단부에 매설된 도시가스관이 토공굴착으로 인하여 도시가스관이 노출됨에 따라 도시가스 매달기시 안전시공을 위하여  관종변경(PI→PLP)이 필요한것으로 판단됨.

Ⅳ		보고자 의견

○ 건설사업관리단에서 제출한 실정보고 검토의견이 적정하다고 판단됨으로 도시가스관 관종변경건에 대하여 승인조치하고,

○ 본건은 원인자부담공사로서 이설비를 납부하여야 하나 관련 현장조사 및 설계도서 등 적정성여부를 검토한후 납부코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 실정보고서 1식.  끝.