문서번호	도시철도토목부-14436
결재일자	2016.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
협조
	주무관

『하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사』

저촉되는 옹벽 철거에 따른 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11

도시기반시설본부

도시철도토목부

『하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사』

저촉되는 옹벽 철거에 따른 검토 보고

본선구간 중 환기구, 본선 구조물 및 가시설에 저촉되는 옹벽의 철거 물량이 설계에 누락되어 이에 대한 검토 보고임.

※ 옹벽구조물 철거 : 전부 및 일부 철거구간 L=115.5m, 증) 금액 32,876천원

Ⅰ		관련근거

○ 대한(하남) 제16-639호(2016.11.15) : 본선 환기구 및 본선구간 공사에 저촉되는 옹벽의 철거물량 설계누락에 따른 실정보고

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사

○ 위    치 : 서울시 강동구 강일동 일원(동광교회~서울시계)

○ 규    모 : 총 연장 1,819m

- 본    선 : 471m (개착박스, 환기구 1개소)

- 입출고선 : 1,348m

○ 도 급 비 : 38,616백만원

○ 공사기간 : '15.03.30 ～ '18.07.26

○ 시 공 사 : 쌍용건설(주)

○ 건설사업관리 : ㈜대한콘설탄트 외 2개사

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

□ 실정보고 내용

○ 당 공사구간 중 환기구, 본선구간 가시설 및 구조물공사에 저촉되는 옹벽구조물 (B=2.7m, H=3.1m, L=115.5m) 철거물량이 설계에 누락되어 있어 옹벽 구조물 처리방안에 대한 적정성여부를 검토하여 보고코자 함.

□ 옹벽 간섭 현황 및 철거 방안

○ 간섭되는 옹벽 위치도

○ 구간별 저촉 옹벽 철거 계획

평 면 도
단 면 도	∙DIAMOND WIRE SAW로 경계부 절단 및 철거
처리계획	환기구에 저촉되어 전면철거 L=43.5m	옹벽구조물 폭 2.7m중 차수그라우팅 천공구간에 저촉되는 폭 0.8m, 길이 28m 구간을 절단하여 철거	옹벽구조물 폭 2.7m중 차수그라우팅 천공구간에 저촉되는 폭 1.1m, 길이 44m 구간을 절단하여 철거

□ 공사비 증 · 감 현황                              (단위 : 천원)

공 종 명	단위	당 초	변 경	증 감	비고
직접공사비	식	-	17,096	증) 17,096
제 잡 비		-	4,495	증) 4,495
도 급 비		-	21,591	증) 21,591
폐기물 처리비		-	11,285	증) 11,285
총 공사비		-	32,876	증) 32,876

※ 적용단가 : [설계가율(100%)+낙찰율(78.229%)]x1/2=89.114 %로 적용

□ 건설사업관리단 검토 의견

○ 환기구#3 및 본선 시점부에 노출된 옹벽은 당초 설계시 미 반영되어 있는 구조물로서 환기구 및 본선구간 가시설 및 구조물 공사시 저촉되어 설계사가 제시한 안을 기준으로 현장여건을 반영하여 옹벽처리 계획을 수립함이 타당할 것으로 판단됨.

Ⅳ		보고자 의견

○ 건설사업관리단에서 제출한 실정보고 검토의견이 적정하다고 판단되므로 저촉되는 옹벽 철거 수량 반영 실정보고건을 승인조치하고,

○ 추가되는 공사비는 향후 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 실정보고서 1식.  끝.