문서번호	도시철도토목부-14881
결재일자	2016.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
협조
	주무관

『하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사』

접근경보기 설치 반영에 따른 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11

도시기반시설본부

도시철도토목부

『하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사』

접근경보기 설치 반영에 따른 검토 보고

본공사 구간중 입출고선 공사는 기존5호선 입출고선에 근접(30m이내)하여 시행토록 계획되어 있어 철도보호지구내의 행위허가 신고시 기존5호선의 안전을 위하여 기존5호선 건축한계내로 작업차량 등이 접근하지 못하도록 접근경보기(감지센서)를 설치하여 달라는 요청에 따라 설치비의 적정성 여부를 검토하여 보고함.

※ 공사비 증감현황 : 접근경보기 7개소,  42,726천원(증)

Ⅰ		관련근거

○ 대한(하남) 제16-660호(2016.11.23) : 접근경보기(감지센서) 설치 반영

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사

○ 위    치 : 서울시 강동구 강일동 일원(동광교회~서울시계)

○ 규    모 : 총 연장 1,819m

- 본    선 : 471m (개착박스, 환기구 1개소)

- 입출고선 : 1,348m

○ 도 급 비 : 38,616백만원

○ 공사기간 : '15.03.30 ～ '18.07.26

○ 시 공 사 : 쌍용건설(주)

○ 건설사업관리 : ㈜대한콘설탄트 외 2개사

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

□ 실정보고 내용

○ 입출고선 공사구간은 철도안전법 제45조 철도보호지구(철도경계선으로부터 30m 이내)에 해당되어 철도보호지구내의 행위신고시 기존5호선의 안전을 위하여 기존5호선 건축한계내로 작업차량 등이 접근하지 못하도록 접근경보기(감지센서)를 설치하여 달라는 요청에 따라 설치비의 적정성 여부를 검토하여 보고함.

○ 서울특별시 도시철도공사 요청내용

분야	요 청 내 용	현장 적용	비고
전기	∙ 지하철 안전을 위한 건축한계 접근 경보기(감지센서) 설치 요함.	∙ 접근 경보기(감지센서) 설치완료

□ 접근 경보기 설치 현황

○ 위치도

○ 접근 경보기 설치 위치 상세도

○ 접근 경보기 설치 상세도

○ 접근 경보기 사진

□ 공사비 증 · 감 현황                                        (단위 : 천원)

공 종 명	단위	당 초	변 경	증 감	비고
직접공사비	식	-	33,135	증) 33,135
제 잡 비		-	9,687	증) 9,687
도 급 비		-	42,822	증) 42,822

※ 적용단가 : [설계가율(100%)+낙찰율(78.229%)]x1/2=89.114 %로 적용

□ 건설사업관리단 검토 의견

○ 입출고선 교량공사 구간은 철도안전법상 철도보호지구에 해당되어 관리기관인 서울특별시 도시철도공사에 철도보호지구내의 행위신고시 협의사항인 바기존5호선 건축한계내로 작업차량 등이 접근하지 못하도록 접근경보기(감지센서)를 설치함이 적정한 것으로 판단됨.

Ⅳ		보고자 의견

○ 건설사업관리단에서 제출한 실정보고 검토의견이 적정하다고 판단되므로 접근경보기 설치 반영 실정보고건을 승인조치하고,

○ 증가된 도급공사비는 5천만원 이하이나 전기공사 관련 별도공사이므로 우리부 설계변경자문위원회(소위원회) 자문을 거쳐 설계변경에 반영코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 실정보고서 1식.  끝.