문서번호	도시철도토목부-4345
결재일자	2019.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
협 조
	주무관
	주무관
	주무관

『하남선(5호선 연장)1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역』

준공기한 연기 및 계약금액 조정 검토 보고(총괄5회 및 6차2회)

2019. 4.

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

『하남선(5호선 연장)1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역』

준공기한 연기 및 계약금액 조정 검토 보고(총괄5회 및 6차2회)

『하남선(5호선 연장)1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역』과 관련 준공기한 연기 및 건설사업관리기술자 투입변경에 따른 총괄5회 및 6차2회에 대한 계약금액 조정 검토 보고임. ※ ㈜대한콘설탄트 대한(철도)제19-59호(‘19. 4. 24)

1		책임감리 용역 현황

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 계약금액 : 금2,312,106천원(6차 : 금791,005천원)

○ 용역기간 : ‘15. 3.13 ~ ‘19. 4.30(6차 : ‘18. 2.14 ~ ‘19. 4.30)

○ 감 리 사 : ㈜대한콘설탄트 외 2개사

□ 용역계약 현황

(단위 : 천원)

구분	총괄	1~5차(준공)	6차(진행중)	장 래	비고
용역기간	‘15.3.13 ~’19.4.30	‘15.3.13 ~18.8.8	‘18.2.14 ~19.4.30	-
용역비	2,312,106	1,521,101	791,005	-

2		보고 내용

□ 준공기한 연기 및 계약금액 조정 검토 내용

○ 설계변경 현황(총괄5회, 6차2회)

(단위 : 천원)

구 분	용역비			계약기간			비고
	당 초	변 경	증감	당 초	변 경	증감
총괄 5회	2,312,106	2,477,951	증)165,845	‘15.3.13 ~‘19.4.30	‘15.3.13 ~‘19.11.30	증)214일
6차 2회	791,005	956,850	증)165,845	‘18.2.14 ~‘19.4.30	‘18.2.14 ~‘19.11.30	증)214일

○ 준공기한 연기에 따른 건설사업관리기술자 투입계획 조정 현황(총괄5회, 6차2회)

구 분		당 초	변 경	비 고
계		3	2
책임 감리원	고급	1	-	등급조정(고급→중급)
	중급	-	1
보조 감리원	중급	1	-	투입완료에 따른 철수
	초급	1	1

※ 책임감리원 등급조정(고급→중급) 및 보조감리원(중급) 투입 완료에 따른 철수

○ 변경 사유

- 하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사의 준공기한이 연기됨에 따라 건설사업관리용역의 준공기한 연기 필요

<공사기간 연장 방침 : 도시철도토목부-4716(2019.4.19.)호>

- 건설사업관리용역의 준공기한이 연기됨에 따라 효율적인 예산관리를 위한 감리원 등급조정 필요

3		조치 계획

○ 하남선(5호선 연장) 1-2공구의 건설공사가 연기됨에 따라 건설사업관리용역기간 연기 및 건설사업관리기술자 투입계획을 조정하여 아래와 같이 설계 변경 추진코자 함.

- 설계변경 현황(총괄5회, 6차2회)

구 분	용역비			계약기간			비고
	당 초	변 경	증감	당 초	변 경	증감
총괄 5회	2,312,106	2,477,951	증)165,845	‘15.3.13 ~‘19.4.30	‘15.3.13 ~‘19.11.30	증)214일
6차 2회	791,005	956,850	증)165,845	‘18.2.14 ~‘19.4.30	‘18.2.14 ~‘19.11.30	증)214일

○ 준공기한 연기에 따른 조치사항

- 준공기한 연기에 따른 건설사업관리단 귀책사유 : 없음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙 임 : 건설사업관리단 검토의견 및 설계변경 내역서 각1부.  끝.