문서번호	기전과-13499
결재일자	2016.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
협조

『횡단보도 확충정비 교통신호기 정비공사』

낙찰차액 사용계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10

동부도로사업소

(기전과)

『횡단보도 확충정비 교통신호기 정비공사』

낙찰차액 사용계획 보고

2016년 횡단보도 확충정비 교통신호기 정비공사의 원할한 사업 추진 및 안전사고 예방을 위하여 집행잔액 및 낙찰차액을 사용하고자 함.

관련근거

○ 2016년 횡단보도 확충정비 교통신호기 정비공사 [계약번호 20160*******01(2016.4.29.)]

공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 횡단보도 확충정비 교통신호기 정비공사(거여5단지앞)

○ 공사개요 : 교통신호제어기 교체 1대, 신호등지주 교체 8본 외 기타 1식

○ 공사기간 : 2016. 05. 02. ~ 2016. 12. 31.

○ 계약금액 : 77,006,100원

○ 계 약 자 : ㈜신한네오텍 대표 강미순

예산 현황                                       (단위:천원)

공 사 명	예산액	발주금액	계약금액	낙찰차액	집행잔액	비 고
2016년 횡단보도 확충정비 교통신호기 정비공사	136,000	88,110	77,006	11,104	30,478	굴착복구비 지출 : 17,412천원
합 계	136,000	88,110	77,006	11,104	30,478

낙찰차액 및 집행잔액 사용 계획

○ 잔여 예산금액 : 41,582천원 [낙찰차액(11,104천원) + 집행잔액(30,478천원)]

○ 사용계획 : 노후 신호지주 교체 (국민신문고 민원사항)

- 흑관지주(용융 아연도금 안된 지주)로 부식상태 심함

- 장    소 : 송파구 거여동 거여라이프아파트 교차로

- 공사개요 : 노후 신호지주 교체 7본 외 기타 1식

- 소요예산 : 41,582천원

보고자 의견

○ 상기의 예산사용 계획에 따라 낙찰차액 및 집행잔액을 사용하여 2016년 횡단보도 확충정비 교통신호기 정비공사 시공 후 설계변경을 시행하여, 안전사고 예방 및 교통신호기 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 거여라이프아파트 교차로 현장사진 1부.  끝.