문서번호	시설과-1998
결재일자	2015.3.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
협 조

『2015년도 경희궁』

문화재보수정비 사업 추진계획

2015

경영지원부

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2015년도 경희궁』

문화재보수정비 사업 추진계획

경희궁을 복원사업 후 약 20여년이 경과되어 2015년도 문화재보수정비 사업을 실시하여 문화재 효율적 유지관리 및 관람환경을 개선하고자 함

Ⅰ				경희궁 개요

❍ 경희궁지 관리면적 : 11,101.50㎡

❍ 흥화문, 월랑, 숭정문, 숭정전, 자정문, 자정전, 태령문, 태령전

❍ 준공년도 : 자정문·북월랑(1998년), 숭정전(1994년)

❍ 정비범위

- 자정문 지붕 해체보수(면적 85.34㎡, 한식목구조, 팔작지붕)

- 북월랑 기와고르기(면적 134.42㎡, 한식목구조, 합각지붕)

- 숭정전 정밀 안전진단 (면적 245.79㎡, 한식목구조, 팔작지붕)

Ⅱ				추진배경 및 필요성

❍ 자정문 지붕 추녀 4곳중 뒷뿌리 3곳이 들림현상으로 지붕해체 보수가 필요

❍ 북월랑 지붕기와는 동파로 인한 파손, 부분누수, 홍두께흙 및 기와

흘러내림 현상이 있어 기와고르기가 필요

❍ 숭정전 지붕 누수 및 추녀 변화가 의심되어 정밀 안전진단을 실시하여       그 결과에 따라 보수보강이 필요

Ⅲ				주요 추진계획

❍ 자정문은 지붕 전체를 해체 보수

❍ 북월랑 지붕은 동파된 기와, 부분누수 부위 기와 교체하고, 홍두께흙 및 기와 흘러내린 기와는 고르기

❍ 숭정전은 정밀 안잔진단 실시 (2015년도 집행잔액 발생시)

<자정문>	<추녀 뒷뿌리 3곳 처짐>
<북월랑>	<기와 흘러내림>
<숭정전>	<지붕누수 및 추녀변화>

Ⅳ				추 진 경 위

❍ 2014. 5월  : 지붕보수 공사 사업비 확보요청【박물관→(시)문화재과,문화재청】

❍ 2015. 2. 10 : ‘15년 문화재보수정비 국고보조금 교부통지【문화재청→(시)문화재과】

❍ 2015. 3.10 : ‘15년 사업비 세부 사업 내용 통보【문화재청→박물관)】

Ⅴ				향 후 계 획

❍ 자정문 및 북월랑 지붕 보수

- 2015.  3      : 기술타당성 심사

- 2015.  4 ~ 5 : 실시설계용역(문화재청 설계승인 포함)

- 2015.  5월중  : 공사발주(감리발주)

- 2015.  6      : 공사 착공

- 2015. 10      : 공사 준공

❍ 숭정전 정밀 안전진단

- 2015.  6      : 기술타당성 심사

- 2015.  7      : 용역 발주

- 2015.  8      : 용역 착공

- 2015. 10      : 용역 준공

Ⅵ				소 요 예 산

❍ 소요금액 : 400,000천원 (국비 280,000천원 시비 120,000천원)

- 공 사 비 : 322,000천원

- 설 계 비 :  38,000천원

- 감 리 비 :  10,000천원 (재배정시 본청 주관과 통계목 조정필요)

- 정밀 안전진단 : 30,000천원(집행잔액 포함 : 80,000천원)

❍ 계약방법

- 공사 : 공개경쟁입찰

- 설계 : 전자공개수의계약

- 감리 : 소액수의계약

- 정밀 안전진단 : 공개경쟁계약, 전자공개수의계약

❍ 예산과목(국비70:시비30) : 역사문화유산의 계승발전, 문화재보존복원, 국가지정문화재 보수, 시설비(401-01)

성과지표 :   6. 사업 운영의 적정성

13. 관람 환경의 적정성

14. 고객 만족도

첨부 : 1. 2015년도 국가 보조금 신청서 1부.

2. 2015년도 문화재보수정비 국고보조금 교부결정서 1부.

3. 2015년도 문화재보수정비 국고보조금 교부 관련 회신 1부.

4. 2015년도 감리 대상 문화재수리 고시 사항 알림 1부. 끝.