문서번호	도로보수과-7627
결재일자	2018.9.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장

『2018년 관내포장도로 굴착복구공사 - 북부』 설계변경(2회) 검토 보고

2018. 9.

북부도로사업소

[도로보수과]

설계변경(2회) 검토 보고

- 2018년 관내포장도로 굴착복구공사(연간단가) -북부

우리사업소에서 시행중에 있는『2018년 관내포장도로 굴착복구공사(연간단가)』에 대하여 공사추진에 따른 설계변경(2회) 검토 보고임.

관련 근거

○ 북부 제18-39호(2018.09.10) : 건설사업관리용역(실정보고 검토보고서)

공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 관내포장도로 굴착복구공사(연간단가) - 북부

○ 공사개요 : 소규모 포장 75a, 절삭후 덧씌우기 580a

○ 공사기간 : 2018.03.15 ~ 2018.12.31

○ 공사금액 : 금1,503,580,000원

○ 도 급 자 : 기경건설(주)  대표 강용석

설계변경 보고

○ 유관기관별 도로굴착복구 관리청 복구의뢰 물량 증가 발생

- 상수도, 통신, 전기, 도시가스 등 복구의뢰 증가

· 소규모(관로) 포장복구 : 당초 75a ⇒ 변경 125a(증 50a)

· 차로단위(절삭후 덧씌우기) 포장복구 : 당초 580a ⇒ 변경 305a(감 305a)

○ 도로굴착복구 정비물량에 따른 공종별 수량내역 증,감 조정

설계변경 내용

○ 공사비 변경내역

(단위:원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 감	비고
총 공 사 비	2,601,000,000	2,601,000,000	-
도 급 비	1,503,580,000	1,827,480,000	증) 323,900,000
관 급 비	898,580,000	574,680,000	감) 323,900,000
이 전 비	198,840,000	198,840,000	-

○ 주요공종 변경내역

공 종	규 격	단위	수 량		증 ․ 감	비 고
			당 초	변 경
소규모 포장복구	야 간	a	75	125	증) 50
절삭 후 덧씌우기	야 간	a	580	275	감) 305

조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 변동분 정비 물량 증ㆍ감에 따른 부족분 예산을확보된 예산범위내에서 설계변경을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

별 첨 1. 건설사업관리용역 실정보고 검토서 1부.

2. 설계변경(2회) 내역서 1부.   끝.