문서번호	도로보수과-1379
결재일자	2018.2.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
협 조
	주무관

『2018년 노후포장도로 정비공사』

예산집행 및 공사 추진계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 02.

도 로 보 수 과

『2018년 노후포장도로 정비공사』

예산집행 및 공사 추진계획 보고

2018년 노후포장도로 정비예산이 재배정 되어 시민이 안전하고 쾌적한 서울시 포장도로 유지관리를 위하여 2018년 노후포장도로 정비공사 예산집행 및 공사 추진 계획을 보고드림.

Ⅰ		관련근거

○ ’18년 노후포장도로 정비공사 예산 재배정 및 추진계획 통보

: 도로관리과-896호(2018.1.17.)

단위 : 백만원

구 분	합 계	시 설 비				감리비	재료비
		소계	노후포장도로 정비공사	긴급복구 공사	불량맨홀 정비공사
재배정액	10,991	10,687	8,137	1,850	700	234	70

- 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리(도시개발),        노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅱ		추진방향

□ 아스팔트 포장 시공품질 향상

○ 아스팔트 포장 내구성 향상

- 표층 1등급 골재 사용으로 도로파손(포트홀, 소성변형 등) 저감

- 교통량이 많은 버스전용차로 등 고내구성 포장으로 공용수명 향상

○ 관리감독 강화

- 시공현장 및 아스콘공장 용역사(감리)·사업소 합동점검 실시

- 열화상카메라 활용하여 아스팔트 혼합물 도착온도, 다짐온도 관리

□ 예산 조기집행

○ 노후포장도로 정비 및 긴급복구공사 조기발주 실시

- 계약심사 등 행정절차 조속 이행하여 공사발주

○ 동절기 직후 아스팔트 포장공사 시행 및 상반기 예산 조기집행(50% 이상)

- 선금 및 공사기성금 지급 등을 통해 조기집행 목표달성

Ⅲ		발주방법

○ 효율적인 공사 추진을 위하여 2개 권역으로 분리 발주(폐아스콘 처리        용역 및 차선도색 공사도 권역별로 분리발주)

○ 자재 구매시 아스콘(1등급)은 권역별 별도 구매(공개경쟁입찰)하고,        차선도색 공사에 사용되는 특수페인트는 1,2구역 합쳐서 관급자재로       조달구매

Ⅳ		세부추진계획

○ 정비대상

- 도로관리과에서 선정한 10개 노선 12개 구간중 3개 구간은 2017년          기시행하여 제외

- 민원발생 등 정비가 필요한 구간중 SPI지수 6.4이하 지역 우선 시행

○ 포장단면 결정 : 2018년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)에서 코어       채취 후 노후포장도로 정비공사 포장두께 결정

○ 노후포장도로 정비공사(1구역)

- 총사업비 : 2,940백만원

(도급비 750백만원, 관급비 1,330백만원, 이설비 및 기타 860백만원)

- 공사개요 : t=5㎝~10㎝ A=794a

연번	노선명	구 간	표장면적 (a)
1	곰달래로	목동사거리→화곡사거리	74
2	공항대로	강서구청교차로↔등촌역교차로	105
3	등촌로	등촌역교차로↔등촌지하차도	531
4	39번국도	대장2교↔인천시 경계	60
5	제물포부도로	경인고속출구→남부순환로 합류지점	24
소계			794

○ 노후포장도로 정비공사(2구역)

- 총공사비 : 2,900백만원

(도급비 740백만원, 관급비 1,260백만원, 이설비 및 기타 900백만원)

- 공사개요 : t=5㎝~10㎝, A=908a

연번	노선명	구 간	표장면적 (a)
1	구로동로	구로동로 231↔남구로역교차로	108
2	금오로	오리로교차로↔광명시계	127
3	경인로	도림교↔영등포역 (버스전용차로)	84
4	안양천로	양화교↔오목교	384
5	목동로	목동아파트13단지교차로↔오금교	100
6	양평로	양평교↔양평동사거리	79
7	선유로	양평동사거리↔양화대교	26
소계			908

○ 향후 추진계획

- 2018.  2. : 공사발주 및 계약의뢰(재무과)

- 2018.  3. : 유관기관 홍보 및 관련기관 협의

- 2018.  3. : 공사 착공

- 2018. 12 : 공사 준공.

붙임 : 관련공문 2부. 끝.