문서번호	도로보수과-5539
결재일자	2018.6.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
협 조
	주무관
	주무관
	주무관

『2018년 노후포장도로 정비공사』예산집행 및 하반기 공사 추진계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 06.

도로보수과

『2018년 노후포장도로 정비공사』

예산집행 및 하반기 공사 추진계획 보고

2018년 노후포장도로 정비예산의 효율적인 사용을 위하여 2018년 노후포장도로 정비공사 추진현황과 하반기 예산집행 및 공사 추진 계획을 보고드림.

Ⅰ		관련근거

○ ’18년 노후포장도로 정비공사 예산 재배정 및 추진계획 통보

: 도로관리과-896호(2018.1.17.)

단위 : 백만원

구 분	합 계	시 설 비				감리비	재료비
		소계	노후포장도로 정비공사	긴급복구 공사	불량맨홀 정비공사
재배정액	10,991	10,687	8,137	1,850	700	234	70

- 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리(도시개발),        노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

○ 2018년 노후포장도로 정비공사 예산집행 및 공사 추진계획 보고

: 도로보수과-1379호(2018.2.12.)

○ 2018년 노후포장도로정비공사 사업예산 집행현황 자료 요청

: 도로관리과-8840호(2018.6.11.)

- 낙찰차액 : 전액 감배정 대상

* 지방자치단체 세출예산 집행기준에 의거 부득이 하게 집행계획이 수립된        경우 예외 인정

Ⅱ		현 황

□ 노후포장도로정비공사(강서1구역) 【공정율 100%】

○ 공 사 명 : 2018년 노후포장도로정비공사(강서1구역)

○ 총사업비 : 2,940백만원(도급비 750, 관급비 1,330, 이설비 및 기타860)

* 낙찰차액 : 282백만원

○ 도 급 자 : ㈜베스트로드 라윤주

○ 공사개요 : t=5㎝~10㎝ A=985a

○ 추진현황

연번	노선명	구 간	표장면적 (a)	비고
1	곰달래로	목동사거리↔화곡사거리	134.6	완료
2	공항대로	등촌역교차로→ 강서구청교차로	88.5	완료
3	등촌로	등촌역교차로↔등촌지하차도	559.9	완료
4	39번국도	대장2교↔인천시 경계	93.6	완료
5	제물포부도로	경인고속출구→남부순환로 합류지점	35.9	완료
소계			912.5

□ 노후포장도로정비공사(강서2구역) 【공정율 83.5%】

○ 공 사 명 : 2018년 노후포장도로정비공사(강서2구역)

○ 총사업비 : 3,117백만원(도급비 788, 관급비 1,523, 이설비 및 기타806)

* 낙찰차액 182백만원

○ 도 급 자 : 태인개발㈜ 이원오

○ 공사개요 : t=5㎝~10㎝ A=1,357a

○ 추진현황

연번	노선명	구 간	표장면적 (a)	비 고
1	구로동로	구로동로 231↔남구로역교차로	157.2	완료
2	금오로	오리로교차로↔광명시계	176.4	완료
3	안양천로	양화교↔오목교	661.8	완료
4	목동로	목동아파트13단지교차로↔오금교	138.9	완료
5	경인로	도림교↔영등포역 (버스전용차로)	106.5	하반기
6	양평로	양평동사거리→양평교	20.5	하반기
7	선유로	양평동사거리↔양화대교	58.9	하반기
8	경인로	여의도 공원 주변	36.7	하반기
소계			1,357

□ 포장도로 긴급복구공사(연간단가)【공정율 60%】

○ 공 사 명 : 2018년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)

○ 총사업비 : 1,730백만원(도급비1,147, 관급비 301, 이설비 및 기타 282)

* 낙찰차액 153백만원

○ 도 급 자 : 초인산업개발㈜ 김귀용

○ 공사개요 : 절삭덧씌우기 197a, 소파 49a

○ 추진현황

연번	공 종	구 간	추진실적
1	절삭덧씌우기	남부순환로 구로IC 진입램프 등 40개소	145a
2	소규모 보수	강서로45 까치산역 3번출구 앞 등 43개소	29a
3	휴일대기근무	관내 시도상 도로소파 발생구간	출동 67시간, 대기 125시간

□ 불량맨홀 정비공사【공정율 28%】

○ 공 사 명 : 2018년 불량맨홀 정비공사

○ 총사업비 : 700백만원(도급비 662, 폐기물처리 18, 자료입력 20)

* 낙찰차액 사용

○ 도 급 자 : ㈜다현산업 신시종

○ 공사개요 : 맨홀정비 740개소

○ 추진현황

차수	1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	계
추진실적(개)	63	150	150	150	150	47	30	740
비 고	완료	진행중	7월	8월	9월	10월	11월

Ⅲ		시설비 집행현황

단위 : 백만원

구 분		재배정액	계약금액	낙찰차액	미품의액	계	비고
시설비	계	10,687	8,170	617	1,900	10,687
	노후포장 (1구역)	8,137	2,569	282	549	3,400	감1,000
	노후포장 (2구역)		3,207	182	348	3,737
	긴급복구	1,850	1,694	153	1,003	2,850	증1,000
	불량맨홀	700	700	-	-	700

Ⅳ		조치계획

○ 노후포장도로 정비공사 시설비중 미품의액(1,900백만원)은 포장

상태 불량으로 포트홀 민원 등이 많이 발생되고 있는 구간(목동서로,

가로공원로, 남부순환로, 오목로 등)에 대한 노후포장도로 정비와

여름철 우기후 파손된 도로에 대하여 긴급복구공사에 사용하고자 하며,

긴급복구공사에 필요한 비용은 노후포장도로정비공사에 배정된 금액중

1,000백만원을 설계변경(증액)하여 포장도로 관리에 만전을 기하고자 함.

○ 하반기 노후포장도로 정비공사 구간은 코어 채취후 포장두께를 결정한후

공사를 시행하고 경인로(도림천교⇔영등포역) 버스전용차로는 품질

시험소 도로포장연구센터에 의뢰한 서울형포장 설계결과에 따라

설계변경 반영. 끝.