문서번호	기반시설과-3486
결재일자	2019.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기반시설과장	시설부장

『2019년 한강공원 진출입시설 유지보수 공사(연간단가)』

설계변경(최종) 및 정산보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  10.

한강사업본부

(기반시설과)

『2019년 한강공원 진출입시설 유지보수 공사(연간단가)』

설계변경(최종) 및 정산보고

『2019년 한강공원 진출입시설 유지보수 공사(연간단가)』와 관련 신규공종물량 발생 및 물량증가로 설계변경 및 정산 시행하고자 함

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 한강공원 진출입시설 유지보수 공사(연간단가)

○ 총공사비 : 305,148천원(도급비 304,068천원, 이전비 1,080천원)

○ 공사기간 : 2019. 04. 01. ~ 2019. 11. 30.

○ 계약상대자 : ㈜민정토건(대표 백승언)

Ⅱ		설계변경내용

○ 설계변경근거

- 제1회 설계변경(기반시설과 2055호, `19. 7. 9.시행)

- 제2회 설계변경 요청의 건(민정한강 2019-1010호, `19. 10. 10.시행)

- 작업지시 및 작업완료보고(1~10회)

○ 민원처리 및 공사현장 여건 등에 따른 신규공종 및 물량 변동사항 반영

공종		단위	당초	변경	증·감
수량 변경	목재데크 설치	㎡	280.2	117.8	감)	162.4
	기초앵커 설치	EA	453	-	감)	453
	석재판 철거	㎡	154.5	242.3	증)	87.8
	방부목	㎡	297	2.2	감)	284.8
	무근 콘크리트 깨기	㎥	4.6	9.2	증)	4.6
신규 공종	계단석 붙임(포천석)	㎡	-	72.4	증)	72.4
	유공관 설치	m	-	95	증)	95
	미끄럼방지포장	㎡	-	601	증)	601
	잡철물 설치	ton	-	0.691	증)	0.691

- 주요 설계변경내용

○ 공사비변경

구 분		당 초	변 경	증·감		비 고
총 공 사 비		305,148,000	349,400,000	증)	44,252,000
도급비	공 급 가 액	276,425,455	317,636,364	증)	41,210,909
	부가가치세	27,642,545	31,763,636	증)	4,121,091
	계	304,068,000	349,400,000	증)	45,332,000
이 전 비		1,080,000	-	감)	1,080,000

(단위 : 원)

Ⅲ		설계변경 자문위원회 검토의견 처리

○ 설계변경 자문위원회 개최 (시설관리과-3033, `19.10.17.시행)

○ 검토의견

- 보행안전도우미 노무비로 반영되어 있으나, 경비비목으로 설계내역서 반영 검토 요함

○ 검토의견 처리

- 관련 근거

· 「건설기술 진흥법」제63조(안전관리비용)제1항, 동법 규칙 제60조(안전관리비)제1항제4호 및 제2항제4호

· 행정안전부 기준 제2장(예정가격 작성요령) 제5절(원가계산에 따른 예정가격 결정) 제3관(공사 원가계산), 6(경비), 가(경비의 개념), 다(경비의 세비목)

- 위와 같은 관련 근거에 의거 신호수(보행안전도우미, 열차감시원 등) 비용을 경비비목으로 반영 처리

Ⅳ		조치사항

□ 예산조치

○ 보수물량 증가로 인한 예산부족분(45,342천원)은 기 재배정한 낙찰차액으로 활용

- 예산과목

· 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 접근시설 유지관리, 시설비(35,342천원)

· 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 기전시설 유지관리, 시설비(10,000천원)

□ 향후계획

○ 상기와 같은 내용으로 설계변경 시행하고 공사 준공에 만전을 기하고자 함

붙임 1. 제2회 설계변경 내역서 1부.

2. 설계도면 1부.

3. 총괄집계표 1부.

4. 설계변경 자문위원회 검토의견서 1부.  끝.