문서번호	도로보수과-3571
결재일자	2014.8.4.
공개여부	비공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
협조

【2014년 관내포장도로 불량맨홀정비공사】

설계변경(1회) 검토보고

2014.  8.  4.

성동도로사업소

도로보수과

·

설계변경 검토보고(제1회)

□ 공사 현황

○ 공  사  명 : 2014년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014.  4.  1. ~ 2015. 2. 28.

○ 도  급  자 : 삼서건설(주)  나남열

○ 도  급  비 : 519,924,000원

○ 공사개요 : 맨홀정비 498개소

□ 변경 사유

○ 맨홀정비공사(연간단가)는 불량한 맨홀의 발생에 따라 맨홀을 정비하는 공사로서 단차가 심한 불량맨홀이 다수있어 당초계약된 인상 높이(0~10cm)와 다른 신규공종(4~25cm)이 발생

○ 평탄성 확보를 위한 추가 커팅(5~15cm)맨홀에 대한 신규공종 적용

○ 공종별 수량 조정

□ 설계변경 내역

○ 공종별 물량변경

공 종	규 격	단위	변경수량		증,감	비고
			당초	변경
계		개소	498	558	증)60
하수맨홀	Ø648	개소	75	96	증)21
상수맨홀	Ø648	개소	175	132	감)43
하수통신등	Ø766	개소	75	148	증)73
통신, 전기등	Ø918	개소	75	88	증)13
통신, 전기등	Ø1108	개소	65	47	감)18
통신, 전기	사각	개소	18	26	증)8
특수소형	Ø250	개소	15	21	증)6

○ 신규공종 : 품셈에 의거 산출후 낙찰율 적용

공 종	규 격	단위	수량	비고
계		개소	229
하수맨홀(Ø648)	인상높이 4-25cm	개소	32
	평탄성유지를위한 추가컷팅5-15cm	개소	13
상수맨홀(Ø648)	인상높이 4-25cm	개소	40
	평탄성유지를위한 추가컷팅5-15cm	개소	8
하수, 통신등 (Ø766)	인상높이 4-25cm	개소	46
	평탄성유지를위한 추가컷팅5-15cm	개소	19
하수, 통신등 (Ø918)	인상높이 4-25cm	개소	18
	평탄성유지를위한 추가컷팅5-15cm	개소	22
통신, 전기등 (Ø1108)	인상높이 4-25cm	개소	14
	평탄성유지를위한 추가컷팅5-15cm	개소	1
통신, 전기(사각)	사각, 인상높이 4-25cm	개소	15
소형(Ø250)	평탄성유지를위한 추가컷팅5-15cm	개소	1

○ 공사비 변경내역 : 공종별 수량 조정을 통한 공사비 변경없음(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감	비 고
총공사비	519,924,000	519,924,000	변경없음
도급비	519,924,000	519,924,000
관급비	-	-
이설비	-	-

□ 예산과목

○ 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비

□ 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 신규공종 및 수량조정에 대한 설계변경을 시행하여 맨홀정비에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 1. 변경내역서(신규공종 일위대가표) 1부.

2. 제비율검증결과 1부.

3. 작업완료내역(별첨). 끝.