『하남선(5호선연장)1-1공구 건설공사』

NTR구간 비개착공사

교통안내표지판 설치철거 검토

서울외곽순환도로 하부 NTR구간 시공 전 한국도로공사 허가조건인 교통안내표지판 설치철거에 대한 실정보고임.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선연장)1-1공구 건설공사

○ 공사규모 : 총연장 628.5m, 정거장  1개소

○ 공사기간 : 2015.03.30.～2019.03.28.

○ 공사금액 : 71,409백만원

○ 도 급 자 : 한신공영(주) 외 1개사

2		관련규정

○ 건설사업관리 업무지침 제67조(설계변경 관리)

○ 공사계약일반조건 제19조(설계변경) 및 제20조(계약금액조정)

○ 공사계약특수조건 제16조(설계변경 등)

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조[시행2015.7.1.]

3		추진경위

○ ‘16.06.27 : 비관리청 공사 허가 신청(도시철도토목부⇒한국도로공사 수도권본부)

- 관련문서 : 도시철도토목부 8060(2016.06.27.)

○ ‘16.06.30 : 비관리청 공사 시행 허가(한국도로공사 수도권본부⇒도시철도토목부)

- 관련문서 : 한국도로공사 도로팀 1234(2016.06.30.)

4		실정보고 내용

□ 현 황

○ 서울외곽순환고속도로 하부 공사구간에 대한 한국도로공사 수도권본부 승인조건에 의거 NTR구간 공사 진행 중임을 알리는 교통안내표지찬 설치․철거 실정보고임

□ 안내표지판 설치 개요

○ 설치 기준(한국도로공사 고속도로 하부 비개착공사 관리 업무절차서)

- 비개착공사 5m 전방 고속도로 길어깨(양뱡향)

⇒ 양방향(2개소) 1-1공구/1-2공구 각각 1개소 설치

- 형식 : 복주식

- 색상 : 노랑색 바탕, 검정색 글자(산들고딕체)

○ 설치 위치

안내표지판

⇧

판교

퇴계원

⇩

○ 설치 사진

설치 전(2016.12)	설치 후(2017.01)

5		수량 및 공사비 현황

○ 추가 소요 공사비 : 9,090 천원

구 분	단 위	수 량	공 사 비	비 고
공사 중 교통안전표지판 설치 철거	개소	1	8,002,493	협의단가 (87.745%)
제 경 비			797,507
도 급 금 액			8,800,000
관 급 자 재 대	[eqn: M ^{3}]	2.70	190,000	적정
폐 기 물 처 리	TON	6.0	100,000	적정
총 공 사 비			9,090,000	증)9,090,000

구 분	적 용	검 토
단가적용기준	- 2017년도 표준시장단가 적용, 견적서 적용 - 신규비목 산출단가(표준품셈) 적용에 따라 협의율 87.745%(적격 낙찰하한율) 적용	적 정

6		관리단 검토의견

○ 외곽순환도로 교통안내표지판 설치철거는 관리기관(한국도로공사)의 공사 허가조건에 따른 실정보고 검토로서

○ 수량 및 단가산출은 적정하게 적용 되었으며, 추가 공사비(증9,090천원)는 발주처 설계변경 소위원회 심의를 거쳐 설계 반영함이 타당할 것으로 사료됨.

붙임 : 실정보고 서류 1식. 끝.