문서번호	시설관리과-8348
결재일자	2014.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리과장	소장
협조
	주무관

간선배관 부설 계획 보고

(신내동 344주변 새우개마을 도로개설구간)

명에의거 관내 지역담당 업무 수행중 도로개설(확장) 구간내 순환배관망 형성을 위한 배관 부설계획을 아래와 같이 보고합니다.

2013. 04.

지방시설주사보  강무진

□ 관련근거

○ 중랑구 도로과-1962(2013.11.29.)호 「새우개마을 진입도로 개설공사 시행 알림」

○ 본부 급수설비과-1262(2014.3.3)호 「2014년 간선배관 사업비 배정통보」

□ 보고내용

○ 중랑구(도로과)에서 시행하는 새우개마을 도로개설(및확장)구간내 주민 순환배관망형성을       위한 상수도관 부설(신설)계획에 의거 본부에서 예산이 배정되어 공사주친중에 있음

○ 중랑구청 도로개설 및 상수도 (부설)공사현황

· 공  사 명 : 새우개마을 진입도로 개설공사

· 기간(규모) : 2013.12.2.~2014.12.31.(B=4~12m, L=1,204m)

· 상수도공사 : D=150~200mm, L=620m

○ 도로개설 구간내 상수도 부설구간 총 620m중 1단계 보상이 끝난 1구간(70m)는 도로개설       이 완료(도시가스 및 하수도 부설완료)되어 상수도 배수관 부설이 필요한 실정임

○ 상수도 부설구간 도로개설 현황

구간	위치	연장(m)	주택철거율 (공정율%)	비고 (보상진행)
1	신내동 278-6호부근	70	100	1단계
2	신내동 283-3	60	50	1단계
3	신내동 284-9	70	0	2단계
4	신내동 284-2	80	0	2단계
5	신내동 279-5	50	0	2단계
6	신내동 281-1	80	0	2단계
7	신내동 283-5~278-5	210	0	2단계

□ 처리의견

○ 전체(620m) 상수도 배수관 부설을 위한 도로개설이 현재 1단계(130m)만 진행중에 있으며       2단계(490m) 사업은 보상이 진행(완료일 미정)중에있어 도로개설 사업이 지연되어 있는        실정임.

○ 상기와 같은 사항으로, 전체 사업에 대한 단위사업(발주)은 어려운 실정으로 도로 개설이       완료되는 구간부터 순차적으로 작업시행 코자 합니다

○ 따라서 도로개설이 완료된 1구간(70m)의 원활한 간선배관 공사 추진을 위하여 우리사업소        계약된 연간단가 업체에 작업시행하여 순환배관망 형성 및 향후 주민 맑은물 공급 업무에 만전       을 기하고자 합니다.

○ 공사현황

- 공사명 : 묵동외7개동 상수도 공사(장기계속공사)

- 공사구간 : 신내동 287-6호 주변

- 공사내역 : D=150mm, L=70m

- 도급비(예정) : 8,400천원

- 예산과목 : 자본적지출,가동설비자산,구축물,시설비(간선배관)

붙임 : 1. 위치도 및 배관망도 각 1부

2. 도로개설구간 현황사진 1부. 끝.