검 토 의 견 서
공사명	강남순환도시고속도로8공구건설공사	보고일자 및 작성자	2014.06.26 윤 상 훈
제 목	구룡지하차도구간 기존광역상수도관 철거 수량변경 건	관련문서	롯건강8 제2014- 178호(2014.06.19)

□ 검토목적

- 구룡지하차도구간 기존광역상수도관 철거수량 변경 적정성 검토

□ 공사개요

- 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

- 위    치 : 서초구 우면동 ~ 과천시 주암동 ~ 강남구 수서동

- 도 급 비 : 221,555백만원

- 도급사/감리사 : 롯데건설(주)외 1개사/(주)동명기술공단

□ 관련근거

- 공사계약일반조건 제19조

- 롯건강 제2014-178호 (2014.06.19)

□ 검토내용

1. 변경 사유

- 구룡지하차도구간(L=120M) 기존광역상수도관 철거를 가시설을 설치하지 않고 철거       토록 설계되어 있으나 현장확인결과 굴착심도4.1m로서 자연경사(1:1경사) 터파기시       기존도로를 침범하여 안전을 고려 추가로 가시설(L=120M, H=6.1M)이 필요함

- 토공구간(L=70m)은 철거토록 되어 있으나 미 철거.

2. 현황도

가. 평면도

당  초

변  경

나. 종단면도

구 분	당 초	변 경
지하 차도부 (L=120m)
내 용	- 가시설 없음	- 가시설 추가(H=6.1M)
토공부 (L=70m)
내 용	- 가시설 설치	- 가시설 설치 삭제 (광역상수도관 미철거)

3. 철거수량변경 현황

구 분		당 초	변 경	비 고
구룡지하차도	지하차도구간	120m	120m
	토 공 부	70m	-
	설계오류	60m	-
	합계	250m	120m

4. 공사비 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증. 감	비 고
1.철거구간 (190m→120m)	수 량	190m	120m	감) 70m
	1. 강관절단	15,567	9,730	감) 5,837
	2. 강관철거	47,846	30,218	감) 17,628
	3. 고재대	-80,397	-50,777	증) 29,620
	4. 가시설 설치	90,325	87,567	감) 2,758
	5. 직접공사비	73,341	76,738	증) 3,397
	6. 제경비	22,469	23,362	증) 893
	7. 합 계	95,810	100,100	증) 4,290
2.설계오류분 (60m→0m)	수 량	60m	-	감) 60m
	1. 강관절단	4,930	-	감) 4,930
	2. 강관철거	15,109	-	감) 15,109
	3. 고재대	-25,388	-	증) 25,388
	4. 직접공사비	-5,349	-	증) 5,349
	5. 제경비	-1,361	-	증) 1,361
	6. 합 계	-6,710	-	증) 6,710
총 공 사 비		89,100	100,100	증) 11,000

□ 검토결과

• 구룡지하차도 U-type구간 기존광역상수도관은 가시설 설치없이 철거토록 당초 설계에 반영되어 있으나 현장여건과 상이하여 추가로 가시설(L=120M, H=6.1M)이 필요.

• 토공구간(L=70m)은 철거토록 되어 있으나 지하차도 구조물에 지장 없어 미철거.

• 상기와 같이 검토한 결과 구룡지하차도 광역상수도관 철거 수량변경은 적정하다고 사료되며,     추후 설계 변경하여 도급에 반영코자 함.

2014. 06

강남순환 도시고속도로 8공구 건설공사 책임감리원 최 태 규