검 토 의 견 서

□ 공 사 명 : 마포로 중앙차로 및 교통개선공사

□ 검토건명 : 아현고가 철거 및 충정로 중앙버스전용차로 교통규제심의 결과를 반영한	교통안전시설물 설치공사 설계 및 감리 용역비 실정보고

□ 실정보고 사유

- 아현고가 철거공사 및 충정로 중앙 버스전용차로공사에 따른 교통규제심의 결과를	반영한 교통안전시설물 설치공사에 대해서 관할기관인 서울시 서부도로사업소와 업무협	의 결과 설계 및 감리 자격요건을 충족하는 업체를 선정하여 공사시행토록 협의됨

- 따라서 자격요건을 충족하는 업체를 선정하여 설계 및 감리용역을 수행 하였음

- 그에따른 교통안전시설물 설치공사 설계 및 감리용역비를 설계에 반영하여 정산하고자함

□ 관련근거

- 교통안전시설물 원인자부담공사 승인요청:(토목부-2012, 2014.02.04)

- 교통안전시설물 원인자부담공사 승인통보:(서부도로사업소 도로보수과-1204, 2014.02.10)

□ 실정보고 내용

구 분	규격	단위	당초	변경	증․감	비고
교통안전시설물 설계 용역비		식	-	1	1	제‧요율 제외공종
교통안전시설물 감리 용역비		식	-	1	1	제‧요율 제외공종

□ 설계 및 감리용역비 산출근거 검토

1. 설계비

구 분	공사비 요율방식	실비정액가산방식	비고
노면 및 표지판 설치공사	33,000,000	42,200,000	적용공사비: 919,167,324원 적용요율: 3.62%
교통신호기 설치공사	26,000,000	37,800,000	적용공사비: 686,934,167원 적용요율: 3.79%
공급가액	59,000,000	80,000,000
부가가치세	5,900,000	8,000,000
설계용역비	64,900,000	88,000,000	공사비 요율방식 적용

※설계비 산출은 직접공사비 기준 적용 요율을 산정하여 적용한 설계비 와 실비정액가산방식을	적용한 설계비를 비교한 결과 공사비 요율방식이 저렴하여 적용함

2. 감리비

구 분	공사비 요율방식	직접비 기준	비고
노면 및 표지판 설치공사	15,000,000	20,000,000	적용공사비: 919,167,324원 적용요율: 1.69%
교통신호기 설치공사	18,500,000	14,000,000	적용공사비: 686,934,167원 적용요율: 2.70%
공급가액	29,000,000
부가가치세	2,900,000
감리용역비	31,900,000		노면 및 표지판: 공사비요율방식 적용 교통신호기: 직접비 기준방식 적용

※감리비는 공사비 요율 방식과, 직접비 기준 방식을 비교 검토하여 더 저렴한	비용을 적용하여 감리비 산정

□ 공사비 증․감 현황                                             (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도급비	교통안전시설물 설치공사 설계용역비	-	59,000,000	59,000,000	제‧요율 제외공종
	교통안전시설물 설치공사 감리용역비	-	29,000,000	29,000,000	제‧요율 제외공종
	공급가액	-	88,000,000	88,000,000
	부가가치세	-	8,800,000	8,800,000
	계	-	96,800,000	96,800,000

□ 검토의견

- 상기 내용과 같이 아현고가 철거공사 및 충정로 버스중앙차로 설치공사 교통규제심의	결과를 반영한 교통안전시설물(노면표시,표지판,교통신호기)설치공사에 대하여 설계 및	감리 자격요건을 갖춘 업체를 선정하여 시행함이 타당한 것으로 검토됨

- 따라서 설계비는 공사비요율방식과 실비정액가산방식을 비교 검토한결과 공사비요율

방식이 저렴하여 적용함이 타당하며

- 감리비는 노면 및 표지판설치공사 감리비는 공사비 요율방식, 교통신호기 설치공사는	직접비 기준방식을 적용함이 타당한 것으로 검토됨.

- 그에따른 설계 및 감리비를 설계에 반영하여 정산함이 타당한 것으로 사료됨.

2014.  10. 8

신촌로 중앙차로 및 교통구조개선공사외 1개소

책 임 감 리 원   차  병  채