검 토 의 견 서
공사명	강남순환도시고속도로8공구건설공사	보고일자 및 작성자	2014.06.26 윤 상 훈
제 목	구룡지하차도 집수정 건축 공사 반영	관련문서	롯건강8 제2014- 180호(2014.06.20)

□ 검토목적

- 구룡지하차도구간 집수정 건축공사 실정보고건의 적정성 검토

□ 공사개요

- 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

- 위    치 : 서초구 우면동 ~ 과천시 주암동 ~ 강남구 수서동

- 도 급 비 : 221,555백만원

- 도급사/감리사 : 롯데건설(주)외 1개사/(주)동명기술공단

□ 관련근거

- 공사계약 일반조건 제19조, 제19조의2

- 롯건강 제2014-180호 (2014.06.20)

□ 검토내용

1. 변경 사유

- 집수정 및 전기실 잡철물(그레이팅, 출입문, 사다리)이 설계도면에 표시되어 있으나 내역서에 누락되어 반영

- 구룡지하차도의 유지관리를 위한 건축공사 시설물(기초 패드, 에폭시도장 등) 보완

2. 변경 현황도

가. 집수정

현황도

나. 외부출입구 계단실

현황도

3. 주요 변경 현황

공 종		단 위	수량	내 용	설치위치	비 고
1.내역 누락	조적공사 (시멘트벽돌)	천매	6.40	펌프실 및 전기실사이벽체	집수정	도면표기
	출입문설치	개소	2.00	펌프실, 전기실 출입문설치	펌프,전기실	도면표기
	출입문설치	개소	1.00	외부출입구 출입문	외부출입구	도면표기
	창문설치	개소	1.00	외부출입구 창문설치	외부출입구	도면표기
	그레이팅 제작	개소	5.00	수중펌프 및 배관 개구부	펌프실	도면표기
	그레이팅 제작	개소	2.00	사다리설치를 위한 개구부	펌프실	도면표기
	사다리설치	개소	2.00	펌프실에서 집수정 유지관리용	펌프실	도면표기
2.유지관리시설	전기실 기초패드	M3	10.00	전기판넬설치를 위한 콘크리트	전기실	시설관리공단요구
	에폭시 페인트	M2	143	펌프실 및 전기실바닥 방수	전기실	시설관리공단요구
	출입문설치	개소	1.00	연결통로의 냉난방기 차단용	연결통로	시설관리공단요구
	논슬립	M	55.00	외부출입구계단실의 미끄럼방지용	외부출입구	시설관리공단요구

4. 공사비 증감 현황

단위 : 천원

구 분	당 초	변 경	증. 감	비 고
1. 내역누락	-	10,166	증) 10,166
2. 유지관리시설	-	6,270	증) 6,270
3. 직접공사비	-	16,436	증) 16,436
4. 제경비	-	5,564	증) 5,564
5. 합 계	-	22,000	증) 22,000
6. 부가세	-	2,200	증) 2,200
총 공 사 비	-	24,200	증) 24,200

□ 검토결과

• 도면에 표시되어 있으나, 내역서에 누락된 수량 반영

• 유지관리를 위한 건축공사 시설물 보완(시설관리공단 요구사항 반영)

• 신규단가는 협의 단가율(79.855%) 적용하였음

• 상기와 같이 검토한 결과 구룡지하차도 집수정 및 외부출입구 계단실의 유지관리에 필요한      시설물은 내역반영 및 추가설치가 적정하다고 사료되며, 추후 설계변경하여 반영코져함.

2014. 06.

강남순환 도시고속도로 8공구 건설공사 책임감리원 최 태 규