검 토 의 견 서

□ 공 사 명 : 마포로 중앙차로 및 교통구조개선공사

□ 검토건명 : 아현고가 철거공사시 PSC-BEAM 보강시설 설치

□ 실정보고 사유

- 당초에는 아현고가 부재 인양시 전도방지 시설로 와이어를 설치하도록 설계되어 있으	나 구조물이 노후화 되어있어 인양 전․후 좌굴에 의한 전도위험이 상존되어 있음

- 따라서 PSC-BEAM, RC-SLAB 상부에는 보강강판을 설치하였으며 PSC-BEAM 하	부에는 잭서포트를 설치하여 좌굴에 의한 전도를 방지하여 안전사고 발생없이 아현고가	철거를 이상없이 완료하였음

- 상기와 같이 실제 설치한 보강시설 설치 수량을 설계에 반영하여 정산하고자 함

□ 실정보고 내용

구 분	규격	단위	당초	변경	증․감	비고
상부보강 강판 제작 및 설치	500×150×11, 주간	ton	-	3	3
셋트앵커	Ø16×150	ea	-	1,768	1,768
강판 해체	야간	ton	-	3	3
하부보강 잭서포트 제작 및 설치	30ton×4"pipe,주간	ea	-	330	330
잭서포트 해체	야간	ea	-	330	330

□ 수량검토

1. 상부보강 강판 설치 수량검토

구 분	부재 보강시설		비 고
	구 간	산출근거
강판 제작 및 설치	PSC 거더	0.001㎥×3개소×9열×15SPAN=0.405㎥
	RC거더	0.001㎥×2개소×4열×2SPAN=0.016㎥
	소 계	=0.421㎥
	총 무게(ton)	=0.421㎥×7,850kg/㎥=3,305kg= 3.305ton ×10%재료할증=3.636ton
셋트앙카	PSC 거더	4ea×3개소×9열×15SPAN=1,620ea
	RC거더	4ea×2개소×4열×2SPAN=64ea
	계	1,684ea×5%재료할증=1,768ea

- 상부보강 강판 상세도

PSC거더	RC거더

- 상기와 같이 상부보강 강판을 PSC거더 절단부재당 3개소(RC거더 2개소)설치하여 인양	시 전도에 의한 안전사고를 예방하는 것이 적정한 것으로 검토됨.

2. 하부보강 잭서포트 설치 수량검토

구 분	부재 보강시설		비 고
	구 간	산출근거
잭서포트 제작 및 설치	PSC 거더	1ea×2개소×11열×15SPAN= 330ea	※잭서포트 재료비는 6 SPAN적용(재활용)으로 139ea 반영

- 하부보강 잭서포트 상세도

- 상기와 같이 하부보강 잭서포트를 절단부재당 양 끝단 2개소씩 설치하여 전도에 의한	안전사고를 예방하는 것이 적정한 것으로 검토됨.

□ 단가 적용사항 검토

1. 강판 제작 및 설치

구 분	단가적용기준	적용단가	비 고
강판(잡철물) 제작 및 설치	-신규단가 적용: 2014년 상반기 노임단가 및 표준품셈을 적용하여 일위대가 산출 -낙찰율 86.968% 적용	3,777,505원	ton당

- 강판(잡철물)제작 및 설치 단가를 2014년 상반기 노임 및 표준품셈을 적용 단가산출하	여 낙찰율 86.968%를 적용함이 타당함

2. 잭서포트 설치

구 분	단가적용기준	적용단가	비 고
잭서포트 설치 (30ton)	-신규단가 적용: 잭서포트 자재단가는 물가자료 등 비교후 최저가격에 낙찰율 적용 - 잭서포트 설치단가는 2014년 상반기 노임단가 및 표준품셈 적용하여 일위대가 산출 - 낙찰율 86.968% 적용	재료비:130,452원설치비: 8,358원	ea당

- 잭서포트 설치 단가는 재료비는 물가정보등 비교후 최저가격을 적용함이 타당하며, 설	치비는 2014년 상반기 노임 및 표준품셈을 적용 단가산출하여 낙찰율 86.968%를 적용함	이 타당함

3. 잭서포트 해체

구 분	단가적용기준	적용단가	비 고
잭서포트 해체 (30ton, 야간)	- 신규단가 적용: 잭서포트 해체단가는 야간할증 적용 및 고소작업 위험할증 적용후 표준품셈에 따라 설치품의50%를 적용하여 일위대가 산출 - 낙찰율 86.968% 적용	해체비:8,285원	ea당

- 잭서포트 해체 단가는 야간작업 할증 및 고소작업 위험할증 적용후 표준품셈에 따라	설치품의 50%를 적용 일위대가 산출하여 낙찰율 86.968%를 적용함이 타당함

□ 공사비 증․감 현황                                             (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도급비	PSC빔 보강시설 설치	-	16,160,522	16,160,522
	부가가치세	-	1,616,052	1,616,052
	계	-	17,776,574	17,776,574

□ 검토의견

- 상기 내용과 같이 아현고가차도는 부재인양시 보강대책으로 당초 설계에는 와이어를	이용한 지보재 설치가 반영되어 있었으나 구조물이 노후화 되어있어 인양 전․후	좌굴에	의한 전도위험이 상존하여 이에 대한 추가 보강이 필요한 것으로 검토됨

- 그에따라 상부에는 보강강판을 설치하고 하부에는 잭서포트를 설치하여 인양 전․후	좌굴에 의한 전도위험을 사전에 방지하여 안전사고 없이 철거를 이상없이 완료하였음

- 따라서 실제 보강시설 설치수량을 설계에 반영하여 정산하는것이 타당함.

2014.  7. 31

신촌로 중앙차로 및 교통구조개선공사외 1개소

책 임 감 리 원   차  병  채