검 토 의 견 서

□ 검토건명 : 마포로 중앙차로 및 교통개선공사 설계변경(총차-2회, 2차-2회)검토

□ 검토목적

마포로 중앙차로 및 교통개선공사의 설계변경(총차-2회, 2차-2회)에 대하여 책임감리	현장참여자 업무수행지침에 의거 적정성 여부를 검토함.

□ 설계변경 사유

- 당초 충정로 중앙버스전용차로 실시설계는 2011년 2월 완료되었으나 서울지방경찰청

교통안전시설 규제심의 결과 변경사항이 다수 발생하였으며, 중앙버스전용차로 포장설계	기준 변경사항의 반영이 필요하여 중앙버스전용차로 재설계 용역을 시행하였으며 그에따른	결과를 반영하여 설계변경 하고자 함

- 또한 실정보고 승인사항에 대한 공사비 증․감 사항을 반영하여 설계변경 하고자 함

□ 설계변경 내용

1. 충정로 중앙버스전용차로 재설계

구 분	주요변경내용	당 초	변 경	증․감	비고
버스중앙차로구간 포장변경	․버스중앙차로 주행구간 -당초:10cm 평삭후 재포장 (개질아스콘#67) -변경: 5cm 평삭후 재포장 (PSMA,13mm) ․승강장구간(충정로 삼거리) -당초: 10cm평삭+10cm중간층 +보조기층20cm -변경: 프리캐스트 25cm	74,641천원	214,826천원	140,186천원	서울시 방침 적용
보도포장 변경	․보도블럭 -당초: 투수블럭559㎡ -변경: 버스승강장 횡단보도 설치구간 보도포장 추가 반영(고흥석: 증134㎡, 투수블럭: 증84㎡) ․도로경계석 파손구간 재설치 반영 - 증) 58m	23,883천원	33,662천원	9,779천원

구 분	주요변경내용	당 초	변 경	증․감	비고
배수시설 변경	․빗물받이 규격 -당초: 400×500 -변경: 400×1,000 적용(우기시 수시 침 수되어 관할구청 요구사항 반영) ․원형수로관 -당초: 버스중앙차로 승강장구간Ø200 원형수로관 설치 -변경: 타 현장 시공사례 검토 및 시공성, 유지관리성을 고려하여 미 설치	25,782천원	7,763천원	- 18,019천원
교통안전시설 변경	․보행자 무단횡단 방지 울타리 -당초: 미설치 -변경: 승강장,교차로등 을 제외한 전구간 설치 반영(968m) ․교통표지판 설치 -당초: 경찰청 교통규제심의 미반영 -변경: 규제심의 결과 반영 표지판 설치 추가	273,559천원	351,885천원	78,326천원
지장물 이설 및 철거	․버스중앙차로 공사에 따른 지장물 이설 및 철거 -당초: 미반영 -변경: 버스정류장 안내단말기(BIT)철 거 반영, 상수도 맨홀 인상 및 인하 반영, 통신맨홀 인하 반영	-	62,132천원	62,132천원
사급 자재비	․동상방지층재 수량 증 -당초: 0㎥ -변경: 832㎥ (증 832㎥) ․투수블럭 수량 증 -당초: 181㎡ -변경: 663㎡ (증 482㎡ ) ․점자블럭, 유도블럭 - 당초: 91ea - 변경: 152ea (증 61ea)	81,896천원	106,372천원	24,476천원

※ 충정로 중앙차로 재설계 신규단가적용 공종은 산출단가에 낙찰율 86.968%를

적용하였음

2. 실정보고 승인사항

구분	실정보고	내 용	관련근거
1	지하철5호선 안전점검 및 계측관리 용역	-아현고가 철거공사중 지하철5호선 안전점검 및 계측관리 용역비 반영 (증 85,233천원)	실정보고 승인: SMIH-14-15072호(2014.01.14)
2	설계도서 검토 조치결과 반영	-설계도서 검토 조치결과 내용중 아현고가 철거 수량 증감사항 반영 (증 13,528천원)	실정보고 승인: SMIH-14-16609호(2014.02.05)
3	교통우회용 안내표지판 및 이동식 휀스 설치	-아현고가 철거공사시 교통정체 등 민원 최소화를 위하여 안내표지판 추가설치 및 공사중 차로수 확보를 위한 이동식휀스 설치 비용 반영 (증 61,856천원)	실정보고 승인: SMIH-14-21409호(2014.04.01)
4	아현고가 모형제작비	-아현고가 철거후 서울역사박물관에 모형을 제작하여 전시를 위한 비용 반영 (증 16,363천원)	실정보고 승인: SMIH-14-23288호(2014.04.17)
5	CCTV이설 및 공사물량 삭감	-아현고가 상부 CCTV 이설 비용 및 철거방법 변경에 따른 공사물량 변경사항반영 (증 21,264천원)	실정보고 승인: SMIH-14-23288호(2014.04.17)
6	아현고가 철거공사중 모범운전자 배치	-아현고가 전면철거에 따른 교통정체등 민원최소화를 위하여 주요 교차로 구간에 모범운전자 배치 비용 반영 (증 22,585천원)	실정보고 승인: SMIH-14-29068호(2014.06.12)
7	건설폐기물 처리방안 변경에 따른 중간집하장 부재운반비	-당초 중간집하장 운반후 폐기물처리토록 되어있었으나 관련법령에따라 중간집하장 운영이 불가하여 그에따른 운반비용 정산반영 (감 64,573천원)	실정보고 승인: SMIH-14-30468호(2014.06.26)
8	아현고가 안전 철거를 위한 전도방지시설 보강	-아현고가 철거시 좌굴에 의한 전도를 사전에 방지하고자 상부에는 보강강판을 하부에는 잭서포트를 설치한 수량 반영 (증 37,677천원)	실정보고 승인: SMIH-14-34248호(2014.08.08)
9	아현고가 철거 공사중 절단부재 소운반	-아현고가 철거공사시 당초 절단부재는 중간집하장으로 운반하여 처리토록 되어있었으나 협의결과 불가하여 현장내 파쇄장 설치후 소운반하여 처리하였으며 그에따른 소운반 비용 반영 (증 200,541천원)	실정보고 승인: SMIH-14-34928호(2014.08.20)

3. 아현고가 철거공사 수량 증․감 사항

구 분	주요변경내용	당 초	변 경	증․감	비고
아현고가 철거공	․절단 및 인양용 코아천공 -당초:4,632공 -변경:4,298공 (감334공) ․D.W.S절단공(t=300m/m 이상 상부,주‧야) -당초:344㎡ -변경:287㎡ (감57㎡) ․절단부재 인양(편측) -당초:115㎥ -변경:0㎡ (감115㎡) ․절단부재인양(본선) -당초:4,588㎥ -변경:4,739㎥ (증151㎥)	993,829천원	862,496천원	- 131,333천원

□ 검토내용

1. 계약금액 및 계약기간

구 분	계약금액(원)			계약기간		비고
	당 초	변 경	증․감	당 초	변 경
총 차	3,264,954,000	3,925,660,000	증 660,706,000	2013.06.20 ～ 2014.09.19	변경없음
2 차	1,788,748,480	2,449,454,480	증 660,706,000	2014.04.18 ～ 2014.09.19	변경없음

2. 공사비 대비표(총차)

공 종	공사비 대비(원)			비고
	당 초	변 경	증 감
1. 토공	150,099,413	147,114,055	- 2,985,358
2. 철거공	991,431,067	1,098,316,236	106,885,169
3. 포장공	175,066,704	349,891,764	174,825,060
4. 부대공	687,264,200	766,774,111	79,509,911
5. 조경공	62,115,439	62,115,439	-
7. 사급자재비	81,896,475	106,372,933	24,476,458
직접공사비 계	2,147,873,298	2,530,584,538	382,711,240
제경비	820,266,702	916,069,305	95,802,603
지하철 안전점검 및 계측관리용역		85,232,520	85,232,520
아현고가차도 모형제작		16,363,637	16,363,637
공급가액	2,968,140,000	3,548,250,000	580,110,000
부가세	296,814,000	354,825,000	58,011,000
모범운전자(신호수)		22,585,000	22,585,000
도급공사비	3,264,954,000	3,925,660,000	660,706,000
관급자재비	609,430,000	730,750,000	121,320,000
폐기물처리비	492,330,000	407,700,000	- 84,630,000
총공사비	4,366,714,000	5,064,110,000	697,396,000

※ 공종별 변경내역서 별도첨부

□ 검토의견

- 상기 내용과 같이□마포로 중앙차로 및 교통개선공사□의 충정로 중앙버스전용차로	재설계 결과 및 실정보고 승인건 에 대하여 공사비 증·감 사항을 반영한 설계변경	총차(2회), 2차(2회)은 타당한 것으로 검토됨.

2014.  8. 21

신촌로 중앙차로 및 교통구조개선공사외1개소

책 임 감 리 원   차  병  채