검 토 의 견 서

□ 검토건명 : 신촌로,마포로 중앙차로 및 교통구조개선공사 2차분 준공기한 연기 요청 검토

□ 준공기한 연기 요청 사유

- 신촌로,마포로 중앙차로 및 교통구조개선공사와 관련하여 신촌로구간 지하철환기구 이설 위치에 상수관로(D500mm)가 저촉되어 이설이 필요한 상황임

- 그에따라 관리기관인 서울시 서부수도사업소와 업무협의결과 원인자부담 공사시행이 필요하여 현재 공사기한내 준공이 불가능한 상황으로 토목공사 일정 조정이 불가피하여 준공기한 연기 요청하고자함.

□ 검토내용

1. 신촌로 계약금액 및 계약기간

구 분	계약금액(원)			계약기간		비고
	당 초	변 경	증․감	당 초	변 경
총 차	5,937,040,000	변경없음	-	2013.06.20 ～ 2014.09.19	2013.06.20 ～ 2014.10.31	증 42일
2 차	3,689,980,000	변경없음	-	2014.04.18 ～ 2014.09.19	2014.04.18 ～ 2014.10.31	증 42일

2. 마포로 계약금액 및 계약기간

구 분	계약금액(원)			계약기간		비고
	당 초	변 경	증․감	당 초	변 경
총 차	3,925,660,000	변경없음	-	2013.06.20 ～ 2014.09.19	2013.06.20 ～ 2014.10.31	증 42일
2 차	2,449,454,480	변경없음	-	2014.04.18 ～ 2014.09.19	2014.04.18 ～ 2014.10.31	증 42일

□ 검토의견

- 상기 내용과 같이 신촌로, 마포로 중앙차로 및 교통구조개선공사 2차분에 대한 준공기한	연기 요청을 검토한 결과 지하철환기구 이설 공사중 상수도관(D500mm)이 저촉되어 이설이	필요한 상황으로 그에따라 공사기한내 준공이 어려워 2차분 준공기한을 연기함이 타당한	것으로 사료됩니다.

2014. 9. 16

신촌로 중앙차로 및 교통구조개선공사외1개소

책 임 감 리 원   차  병  채