검 토 의 견 서
공사명	강남순환도시고속도로8공구건설공사	보고일자 및 작성자	2014. 06.26 윤 상 훈
제 목	주암교(수서) 임시통행 보도정비공사	관련문서	롯건강8 제2014- 177호(2014.06.19)

□ 검토목적

- 주암교(수서방향) 임시통행 보도정비공사 적정성 검토

□ 공사개요

- 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

- 위    치 : 서초구 우면동 ~ 과천시 주암동 ~ 강남구 수서동

- 도 급 비 : 221,555백만원

- 도급사/감리사 : 롯데건설(주)외 1개사/(주)동명기술공단

□ 관련근거

- 공사계약일반조건 제19조① 4호, 제20조②

- 롯건강 제2014-177호(2014.06.19)

□ 검토내용

1. 변경 사유

- 2014.02.04 : 양재도로상 주암교 주변 현장점검 민원사항처리 협조요청

(서초구청→도시기반시설본부)

- 2014.02.14 : 서초구청 민원처리를 위한 업무지시(도시기반시설본부→감리단)

2. 서초구청 민원 현황도

위 치 : 주암교(수서방향)

3. 주요변경 내용

구 분	서초구청 민원사항	반영사항	비 고
1	비포장도로 콘크리트포장 요구	콘크리트 포장 L=15M, B=2.0M
2	경사로 계단설치 요청	콘크리트 계단 L=11M, B=1.2M
3	주암교내 파손된 보도정비	보도블럭 정비 L=68M, B=1.0M

4. 공사비 증감 현황

단위 : 천원

구 분	당 초	변 경	증. 감	비 고
1. 비포장도로 콘크리트포장	-	315	315
2. 경사로 계단설치	-	679	679
3. 주암교내 파손된 보도정비	-	477	477
4. 소 계	-	1,471	1,471
5. 제 경 비		369	369
6. 총 공 사 비	-	1,840	증)1,840

□ 검토결과

• 도시기반시설본부의 업무지시에 따른 서초구청 민원요구사항(콘크리트 포장외2건)을      반영하였음.

• 신규단가는 협의율(79.855%)를 적용 하였음.

• 상기와 같이 검토한 결과 서초구청 민원요구사항 반영은 적정하다고 사료되며, 추후       설계 변경하여 도급에 반영코져함.

2014. 06.

강남순환 도시고속도로 8공구 건설공사 책임감리원 최 태 규