검 토 의 견 서
공사명	강남순환도시고속도로8공구건설공사	보고일자	2015.06.22
제 목	LH 서초5단지 앞 빗물받이 인상 및 주변부 포장	작성자	윤 상 훈
관련문서	롯건강8 제2015-283호(2015.06.16)	확인자	최 태 규

□ 검토목적

- LH 서초5단지 앞 빗물받이 인상 및 주변부 포장공사의 적정성 검토

□ 공사개요

- 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

- 위    치 : 서초구 우면동 ~ 과천시 주암동 ~ 강남구 수서동

- 도 급 비 : 222,995백만원

- 도급사/감리사 : 롯데건설(주)외 1개사/(주)동명기술공단

□ 관련근거

- 도시기반시설본부-15-2419호(2015.04.30)

- 롯건강8 제2015-283호(2015.06.16)

□ 검토내용

1. 변경 사유

- LH 서초5단지 앞 빗물받이 단차 발생으로 불편하다는 민원 발생에 따른 도시기반시설본부의 조치결과 요청사항 반영

2. 현 황 도

2. 현황사진 및 인상 상세도

□ 주요 변경내용

공 종	당초	변경	증. 감	비 고
빗물받이 인상	-	5개소	증)5개소
주변부 포장	-	264㎡	증)264㎡

□ 공사비증감

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
배 수 공	-	1,664	증)1,664
포 장 공	-	4,422	증)4,422
부 대 공	-	1,003	증)1,003
직접공사비	-	7,089	증)7,089
간접공사비	-	1,147	증)1,147
공급가액	-	8,236	증)8,236
V.A.T	-	824	증)824
총공사비	-	9,060	증)9,060

□ 검토결과

• LH 서초5단지 앞 빗물받이 단차 발생으로 불편하다는 민원 발생에 따른 도시기반시설본부의 조치결과 요청사항 반영

• 신규단가는 협의 단가율(79.855%) 적용 하였음.

• 상기와 같이 검토한 결과 LH 서초5단지 앞 빗물받이 인상 및 주변부 포장공사는   적정하다고 판단되며, 추후 설계변경시 반영하고자 함.

2015. 06. 22.

강남순환 도시고속도로 8공구 건설공사 책임감리원 최 태 규