검 토 의 견 서
공사명	강남순환도시고속도로8공구건설공사	보고일자	2015.09.18
제 목	기존 염곡지하차도 기둥보강공사 교통처리	작성자	윤 상 훈
관련문서	롯건강8 제2015-427호(2015.09.17)	확인자	김 현 태

□ 검토목적

- 기존 염곡지하차도 기둥보강공사 교통처리 계획 반영 적정성 검토

□ 공사개요

- 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

- 위    치 : 서초구 우면동 ~ 과천시 주암동 ~ 강남구 수서동

- 도 급 비 : 229,982백만원

- 도급사/감리사 : 롯데건설(주)외 1개사/(주)동명기술공단

□ 관련근거

- 공사계약 일반조건 제19조, 제19조의2

- 롯건강8 제2015-427호(2015.09.17)

□ 검토내용

1. 변경 사유

- 기존 염곡지하차도 보강 공사중 작업자 안전사고 예방을 위하여 교통 안전시설물을 반영 설치

2. 변경 현황도

- 평면도

- 횡단면도

3. 검토 내용

- 기존 염곡지하차도 기둥 보강공사중 작업자 안전을 위하여 교통안전시설물 반영

- 신규단가는 협의단가(79.85%) 적용

4. 주요 변경 현황

공 종	규 격	단위	당초	변경	비고
P. E드럼설치	φ500×H800	EA	-	350
윙카호스	-	M	-	746
공사안내표지판	900×1,800	EA	-	12
교통안내표지판	900×1,800	EA	-	4
교통안내표지판	점멸식, 1,200×2,400	EA	-	2
P. E 방호벽	1,200×600×900	EA	-	42

5. 공사비 증.감 현황

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
P. E드럼설치 및 철거	-	5,041	증)5,041
윙카호스 설치 및 철거	-	895	증)895
P. E방호벽 설치 및 철거	-	928	증)928
안내표지판		3,750	증)3,750
직접공사비		10,614	증)10,614
간 접 비	-	2,750	증)2,750
V.A.T	-	1,336	증)1,336
총공사비	-	14,700	증)14,700

□ 검토결과

- 기존 염곡지하차도 보강 공사중 작업자 안전사고 예방을 위하여 교통 안전시설물 설치 반영

- 신규 단가는 협의단가(79.85%)를 적용하였음.

- 상기와 같이 검토한 결과 기존 염곡지하차도 기둥보강공사중 교통안전시설물 설치         공사는 적정하다고 판단되며, 추후 설계 변경시 반영 하고자 함.

2015. 09. 18.

강남순환 도시고속도로 8공구 건설공사 책임감리원 김  현  태