검 토 의 견 서
공사명	강남순환도시고속도로8공구건설공사	보고일자	2016. 3.
제 목	L형옹벽 형식변경 실정보고	작성자	송 승 법
관련문서	롯건강8 제2016- 116호(2016.3.15)	확인자	김 현 태

□  검토목적

- 본선고가교 적기개통을 위한 공기단축 방안으로 보강토옹벽 상단 L형측구 시공관련 당초 현      장타설 에서 PC형식의 옹벽으로 변경하고, 중분대 및 방호벽 높이변경 적합여부에 대한 원설계      자의 의견을 반영 하고 그 적정성을 검토코자함.

□  관련근거

- 수성 제 2016-0149호「본선고가교 중분대 및 방호벽 기초 높이 검토회신」

- 롯건강8 제2016- 116호(2016.03.15.)「실정보고 L형옹벽 형식변경 및 방호벽 누락반영」

□  검토내용

1. 변경 사유

- 당초 개통일 2016. 5. 19에서 단축검토일 2016. 5. 7 달성을 위하여 구조물 완료후 보강토옹벽 상단 L형옹벽 시공방법 변경(현장타설→PC옹벽)

- 민자구간 7-2공구 연속성 확보를 위하여 방호벽 및 방음벽 규격변경(H=1.08m→1.35m)

- 보강토옹벽부 방호벽 수량 누락 반영(102m×6열 = 612m)

- 본선고가교 중분대 철근 조립비 누락 반영

- 본선고가교 방음벽 기초 시공방법 변경(현장타설→기계타설)

- 본선고가교 가설방음벽 미시공분 삭감(SH공사 및 LH공사 입주시 아파트 방음벽 기시공 )

본선고가교 접속부 보강통옹벽 상단부 STA.0+478～580(L=102m)

2. L형옹벽 위치도

당초(기초+벽체 현장타설)	변경(기초+벽체 일체화 PC 설치)

-L형옹벽 변경 현황도

당초(현장타설, H=1.08m)	변경(기계타설, H=1.35m)

-방음벽기초 변경 현황도

구 분	현 장 타 설		PC옹벽	비고
	정상공기	돌관공기(주야 24시간)
공 사 내 용	-6팀 기준/ 1Span(20m) -기초 4일 (철근1일+거푸집1일 +타설1일+양생1일) -벽체 5일 (비계1일+철근1일+거푸집1일+타설1일+양생1일)	-6팀 기준/ 1Span(50m) -기초 5일 (철근2일+거푸집 1일 +타설1일+양생1일) -벽체 7일 (철근2일+거푸집2일+타설 1일+양생1일+면정리1일 ※ 정상공기 2span을 주·야로 1일 1회 시공	-자재제작25일 (별도) - 후속공정 영향없음 -현장설치 10일
공 기 산 출	9일(1Span)× 5Span = 45일	12일(1span) ×2Span = 24일	10일
공 기 단 축 일	0일	21일(정상대비)	14일(돌관대비)

4. 공기단축 검토

공 종	규 격	단위	수 량		증․감	비 고
			당 초	변 경
L형옹벽	h=1.4m	m	672	612	-60	(현타→PC옹벽)
중분대 규격변경	h=1.08m →1.35m	m	475	475	-	규격 증가분 레미콘, 철근 자재비 반영
중분대 철근조립	간단	ton	-	24.225	24.225	철근 시공비 누락분 반영
방음벽 기초변경	h=1.08m →1.35m	m	950	950	-	규격 증가분 레미콘, 철근 반영 (현타→기계타설)
방호벽 변경	h=1.08m →1.35m	m	448	1,060	612	규격 증가분 레미콘, 철근 반영 L형옹벽구간 누락분반영
가설방음벽	h=4m	m	1,330	770	-560	본선교 미시공분 삭감

5. 주요변경 현황

구 분	수량	단위	금 액(천원)			비고
			당 초	변경	증․감
1. 구조물공	1	식	227,891	742,448	514,557
2. 부 대 공	1	식	246,987	142,993	-103,994
직접공사비 계			474,878	885,441	410,563
제 경 비			195,422	250,059	54,637
도 급 공 사 비			670,300	1,135,500	465,200

6. 공사비 증감 현황

□ 적용단가 검토

- 신규비목 : 현시점 산출단가에 강제 협의율[(최초낙찰률+100%/2)=79.855%]적용

- 증가수량 : 기 계약된 단가를 적용

□ 검 토 결 과

◦ 상기 내용과 같이 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사중 본선고가교 Landing을 위하여 단축공기 시공방안을 추진 중이며, 이를 위한 보강옹벽 상부 옹벽 형식을 당초 현장타설에서 PC형식으로 변경시 돌관공정 대비 14일의 공기단축이 예상됨.

◦ L형옹벽 형식변경 및 방음벽기초, 방호벽 기초 규격변경 등에 따른 공사금액은 적정하게 산정 되었으므로 추후 설계변경 시 반영함이 타당할 것으로 사료됨.

2016. 3.    .

강남순환 도시고속도로 8공구 건설공사 책임감리원 김  현  태