	주식회사	동일기술공사

우.158-841 서울시 양천구 신월6동 1014-7(혜성빌딩2층) / 전화:(02) 2615-5915 / 팩스:(02) 2615-5920 담당:윤부영

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

문서번호	:	도림(감)제14 - 28호		선결				지시
				접수	일시			결재 ․ 공람
시행일자	:	2014. 4. 22.
					번호
수 신	:	도시기반시설본부장
				처 리 과
참 조	:	토목부장
				담 당 자
제 목	:	부대시설물 추가 실정보고

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서남14-28호(2014. 4. 22)와 관련입니다.

3. 전면책임감리용역 수행중인 「도림교 확장공사」와 관련하여 예비준공 검사시 관련기관(강서도로사업소) 및 발주처로부터 지적된 부대시설물의 보완지시사항 및 영등포 구청, 구로구청에서 요청한 요구사항에 대하여 시공사로부터 실정보고가 붙임과 같이 접수되어 검토 후 보고하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

붙  임 : 1. 검토의견서 1부.

2. 시공사 실정보고 1부.  끝.

서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사 책임감리원  윤  부  영

검 토 의 견 서

공 사 명	도림교 확장공사
검 토 건 명	부대시설물 추가설치 반영에 대한 적정성 검토
관련근거 공문	서남14-28호(2014. 04. 22)
검 토 기 간	2014. 04. 22 ~ 2014. 04. 22 .

■ 검토목적

당 현장 도림교 확장공사 예비준공 검사 시 강서도로사업소, 발주처 보안지시사항  및 관련기관(영등포구청, 구로구청)에서 요구한 부대시설물의 추가 설치 건에 대한 적정성을 검토하고자 함.

■ 검토내용

1. 현황도

영등포방향

구로방향

상세 “A"

상세 “B"

상세 “C"

상세 “D"

2. 실정보고 사유

◦상기구간(현황도 참조)에 대하여 관련기관(강서도로사업소, 영등포구청, 구로구청) 및

발주처에서 보완을 요구한 사항에 대하여 현장여건에 맞게 반영코자 함.

◦ 관련기관 및 발주처 보완요구 세부사항

구 분	수 량	비 고	위 치
옥외용 벤치 설치	4개소	∘영등포구청 요청사항	A
신축이음 배수처리	4개소	∘예비준공검사 지적사항	B
자전거 운행자 안전시설 설치	2개소	∘구로구청요청사항	C
기존교량 집수구 인상	23개소	∘현장점검 지적사항	D

2. 보완지시사항 조치계획(상세도 참조)

옥외용 벤치 설치구간	신축이음 배수처리
옥외용 벤치설치 4개소 (A)	신축이음 배수처리 4개소 (B)
안전시설 설치구간	기존교량 집수구 인상
자전거 운행자 안전시설 설치 2개소 (C)	기존교량 집수구 인상 23개소 (D)

■ 공사비 증․감

공 종		단위	수량		증․감(▽)	금액(천원)		증․감(▽)	비고
			당초	변경		당초	변경
부대공	옥외용 벤치	EA	-	4	증)4	-	1,002	1,002
	신축이음 배수처리	EA	-	4	증)4	-	3,620	3,620
	집수구 인상	EA	-	23	증)23	-	1,486	1,486	집수구 인상등
	자전거 운행자 보호시설설치	EA	-	2	증)2	-	472	472
	자재비	식	-	-			1,117	1,117
직접공사비		-	-	-	-	-	7,697	7,697
제 경 비		-	-	-	-	-	2,773	2,773
공 급 가 액		-	-	-	-	-	10,470	10,470
부가가치세		-	-	-	-	-	1,047	1,047
도 급 액		-	-	-	-	-	11,517	10,470
폐기물처리비		-	-	-	-	-	-	-
공사비 계		-	-	-	-	-	11,517	증)11,517

■ 검토의견

1) 당 현장 예비준공 검사 시 관련기관 및 발주처로부터 요구한 부대시설물    추가 신설에 대한 반영 건을 검토한 바, 관련기관 요구사항인 산책로주변 옥외용 벤치설치, 신축이음 배수처리 및 자전거 운행자 안전시설 설치 등은 준공 후 이용자의 편익 제공과 관련기관 유지관리 측면에서 유리할 것으로 판단되며,

2) 기존교량상판 집수구를 인상하여 원할한 배수처리를 함이 적정한 것으로 사료되므로 실정보고 승인 후 설계변경에 반영코자 함

검 토 자 : 책임감리원   윤 부 영