(주)포스코엔지니어링 (주)동일기술공사	감리 검토의견서	2014. 12
공 사 명	월드컵대교 건설공사
검 토 건 명	수상구간 P11,P13 철근.레미콘 누락분 및 이중가물막이 폐콘크리트 수상운반 처리

▢ 공사개요

○ 공 사 명  : 월드컵대교 건설공사

○  개    요 : 폭 31.4m(왕복 6차로), 연장 1.98km

○  도 급 액 : 176,063백만원

○  공사기간 : 전체 : 2010.03.22 ~ 2015.08.22(66개월)

○  시 공 사 : 삼성물산(주)외 2개사

○  감 리 사 : (주)포스코엔지니어링외 1개사

▢ 검토내용

○ 월드컵대교 수상구간 교각공사 관련하여 주경간교 P11, P13교각 철근 및         레미콘의 수량이 수량산출서에 누락된 부분에 대해 검토

○ 주탑(P11)우물통 기초공사중 내부로 유입되는 물을 방지하기 위하여 설         치한 이중가물막이 철거시 발생하는 폐콘크리트처리 상차건 검토

▢ 관련근거 및 추진경위

○ 2014.04.10.	: 주탑 이중가물막이 폐콘크리트 처리에 대한 설계사의견 회신 → 유신 구조14-1238 (2014.04.10.)
○ 2014.06.24.	: 주경간교 P13 교각 철근 수량 설계도서 미반영 확인 검토건. → 삼건월드컵 2014-247호 (2014.06.24.)
○ 2014.06.25.	: 주경간교 P13 교각 철근 수량 설계도서 미반영 확인 검토 회신 → 월드컵(감리)2014-205(2014.06.25.)
○ 2014.07.02.	: 주경간교 교각 철근 수량 설계도서 미반영 확인 검토건. → 삼건월드컵 2014-254호 (2014.07.02.)

▢ 공사비 증·감 내역

단위 : 천원

공 종	규 격	단위	당 초		변 경		증 . 감		비 고
			수 량	금 액	수 량	금 액	수량	금 액
공사비계		식	1	347,181	1	486,182	1	139,001
부가가치세				34,719		48,618		13,899
도급액				381,900		534,800		152,900
관급자재비				622,587		812,359		189,772
총공사비				1,004,487		1,347,159		342,672

▢ 위치도

P11

P13

▢ 수상구간 P11, P13 철근,,레미콘 누락분 현황

구 분	규 격	단위	당 초			변 경			증 감
			P11	P13	계	P11	P13	계	P11	P13	계
레미콘	19-450-15	㎥	3,165	-	3,165	3,421	-	3,421	256	-	256
합 계(레미콘)		㎥	3,165	-	3,165	3,421	-	3,421	256	-	256
철근	H32	ton	297.271	94.497	391.768	417.845	170.985	588.830	120.574	76.488	197.062
	H22	ton	-	35.744	35.744	-	54.868	54.868	-	19.124	19.124
	H16	ton	-	10.270	10.270	-	11.377	11.377	-	1.107	1.107
합 계(철근)		ton	297.271	140.511	437.782	417.845	237.230	655.075	120.574	96.719	217.293

▢ 현황도

구 분		P11	P13
개요도		레미콘 누락 (수량산출서) 철근 누락 (① 수량산출서) 철근 집계 오류 (② 도면 철근집계표)	철근 누락 (도면 및 수량산출서)
미반영물량	도면 및 수량산출서 누락	레미콘 256 ㎥ 철근 57.873 ton	철근 96.719 ton
	도면 철근집계표 오류	철근 62.701 ton	-
총 계		레미콘 256 ㎥ 철근 120.574 ton	철근 96.719 ton

▢ 주탑(P11) 이중가물막이 폐콘크리트 수상운반 및 처리 누락분 현황

○ 사진대지

폐콘크리트(폐기물)

▢ 공사비 내역 세부현황

	(단위:천원)
구 분	규 격	단위	당 초		변 경		증 감		비 고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
도급 공사비	콘크리트 타설	㎥	3,134	83,699	3,387	90,469	253	6,770
	철근운반 및 가공조립	ton	413.284	262,776	618.308	393,152	205.024	130,376
	폐콘크리트 상차 1회	ton	946	706	1,891	1,413	945	707
	폐콘크리트 운반 (수상-물양장)	㎥			411	1,103	411	1,103
	공 사 비			347,181		486,137		138,956
	부 가 세			34,719		48,663		13,944
	소 계			381,900		534,800		152,900
관급 자재비	레미콘	㎥	3,165	287,025	3,421	310,240	256	23,216
	철 근	ton	437.782	335,562	655.075	502,119	217.293	166,556
	소 계			622,587		812,359		189,772
합 계				1,004,487		1,347,159		342,672

▢ 검토결과

○ 월드컵대교 수상구간 P11, P13 교각의 철근 및 레미콘 물량이 수량산출서에           누락되어 설계사에 의견을 받아 검토 하였으며,

○ 주탑(P11)우물통 기초공사중 내부로 유입되는 물을 방지하기 위하여 설         치한 이중가물막이 철거시 발생하는 폐콘크리트상차도 누락 확인 하였으         며 설계변경시 반영하는 것이 타당하다고 사료됨.