(주)포스코엔지니어링 (주)동일기술공사	감리 검토의견서	2015. 04
공 사 명	월드컵대교 건설공사
검 토 건 명	북단IC L형옹벽, 보강토옹벽, 뒷채움 잡석 설계누락 반영 실정보고

▢ 공사개요

○ 공 사 명  : 월드컵대교 건설공사

○  개    요 : 폭 31.4m(왕복 6차로), 연장 1.98km

○  도 급 액 : 176,826백만원

○  공사기간 : 전체 : 2010.03.22 ~ 2015.08.22(66개월)

○  시 공 사 : 삼성물산(주)외 2개사

○  감 리 사 : (주)포스코엔지니어링외 1개사

▢ 검토내용

월드컵대교 건설공사 북단IC 옹벽공사중 보강토 상단 L형옹벽 구조물과 보      강토옹벽 뒷채움 잡석이 내역서에 누락되어 검토.

▢ 관련근거 및 진행현황

□ 2015.03.24. : 북단IC 보강토옹벽에 대한 원설계사 의견요청(시공사→감리단)

□ 2015.03.24. : 북단IC 보강토옹벽에 대한 원설계사 의견요청(감리단→원설계사)

□ 2015.04.02. : 보강토옹벽에 의견요청 회신(원설계사→감리단)

□ 2015.04.23. : 북단IC L형옹벽 및 보강토옹벽 실정보고

▢ 설계반영 현황

구 분	연 장	구조계산서	철근상세도	수량산출서	도급내역서	비 고
L형옹벽	376M	X	X	O	X	시공비누락 자재비반영
보강토 뒷채움잡석		-	-	O	X	시공비누락 자재비누락

▢ 공사비 변경내용

단위 : 원

공 종	규 격	단위	당 초		변 경		증 . 감		비고
			수 량	금 액	수 량	금 액	수량	금 액
공사비계				231,636,364		305,909,091		74,272,727
부가세				23,163,636		30,590,909		7,427,273
도급액계				254,800,000		336,500,000		81,700,000
관급자재비				70,399,000		54,478,000		-15,921,000
총공사비				325,199,000		390,978,000		65,779,000

▢ 위치도

월드컵대교 북단IC

#1:보강토옹벽40m

#2:보강토옹벽81.46m

#3:보강토옹벽131.18m

#4:보강토옹벽124m

▢  설계도서 현황

□ 보강토상단 L형옹벽

	① 구조계산서 누락 : 보강토옹벽, L형옹벽 ② 철근상세도 누락 : 철근배근시공 불가 ③ 관급자재비 반영, 내역서(시공비)누락

□ 보강토옹벽 뒷채움 잡석 누락

	① 뒷채움 잡석 누락 : 도면 및 수량산출(484㎥) 표기되어 있으나, 시공비와 자재비 누락

▢ 공사비 증·감 내역

(단위 : 천원)

구 분			규 격	단위	당 초		변 경		증 감		비 고
					수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
도급공사비	1.보강토옹벽		블럭식	㎡	968	254,400	968	254,400	-	-
	2.뒷채움공		뒷채움(SB-2)	㎥	-	-	688	16,888	688	16,888
			양질의 토사	㎥	204	400	-	-	-204	-400
	3.L형옹벽공		거푸집설치	㎡	-	-	1,541	42,640	1,541	42,640
			철근가공 및 조립	ton	-	-	28	13,944	28	13,944
			콘크리트타설	㎥	-	-	557	8,628	557	8,628
	소 계					254,800		336,500		81,700
관 급 자 재 비		레 미 콘		㎥	564	32,763	564	32,763	-	-
		철 근		ton	49	37,636	28	21,715	-21	-15,921
		소 계				70,399		54,478		-15,921
총 공 사 비						325,199		390,978		65,779

▢ 실정보고 사유

북단IC 옹벽공사중 보강토 상단 L형옹벽 구조물과 보강토옹벽 뒷채움 잡석      이 내역서에 누락되어 반영

▢ 단가적용 검토

상기 공종은 단순 수량누락 건으로 기계약 단가(낙착율 64.008%)적용      함.

▢ 검토결과

월드컵대교 건설공사 북단IC 옹벽공사중 보강토 상단  L형옹벽 구조물과 보

강토옹벽 뒷채움 잡석이 내역서 누락을 확인하였으며, 원설계사의 검토의견

을 반영 하였고 추후 설계변경시 반영하는 것이 타당하다고 사료됨.