건설사업관리기술자 검토의견서

기술검토 건 명	지중전력설비 이설 요청(한국전력공사)에 따른 검토
공 사 명	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사	검토구분	전력설비 이설
검토기간	2018. 10. 31 ~ 2018. 11.02	회신공문
근거공문	노도지(전력)-543(2018.10.29)호

□ 개   요

「중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사」와 한국전력에서 요청한 동부간선도로(1공구) 확장공사에 따른 지중전력설비 이설 요청〔노도지(전력)-543(2018.10.29)호〕에 따라 현지 조사와 이설 적정성을 검토함.

□ 현  황

1. 현황 및 담당기관

담당기관(담당자)	이설대상 지중전력설비	사용기간	비 고
한국전력공사 (노원도봉지사 유장하)	1. 개폐기 1대 2. 변압기 1대	영구시설물	02-950-6243

2. 이설요구 위치

► 1안 - 콘크리트 주교각 앞 2대

► 2안 - 계단지지 철지주사이 각 1대

3. 평면도 및 사진대지(붙임참조)

보행육교

하부설치

□ 검토내용

- 이설위치의 타당성

- 기존시설물의 지장 여부

- 시설물 철거 및 복구에 따른 문제

□ 결    론

- 본 건은 당 현장과 이웃한 동부간선도로 확장공사 1공구의 공사로 인해 지장되는  전력시설을 한국전력공사에서 당 현장 교각 5번 하부로 지중화 이설하고자 요청 함.

- 현재 교각1~교각5 구간은 개통(2018.05.01.)되어 보행교량 공용중임.

- 한국전력공사에서 이설계획인 위치는 공사가 완료된 구간으로 본 공사에 지장이 없을 것으로 판단되며, 이설하는 공사기간이 하루나 이틀 소요됨.

- 이설위치는 지장물의 간섭이 적고 접근성이 용이한 2안이 적정 할 것으로 사료되며,

- 이설되는 구간이 현재 향후 유지관리 기관인 노원구청과 시설물 관리인수 인계가 위임되지 않은 실정으로 전력설비 설치 착공 전 당 현장과 협의(공사기간, 기존구조물 철거 및 복구계획)후 실시하고,

- 이설 완료 후 기존시설물(보도, 난간, 경계석 등) 철거 및 복구에 따른 추후 하자 책임 문제도 일괄 처리하는 것이 타당할 것으로 판단됨.

중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

책임건설사업관리기술자  오  세  영