검 토 의 견 서
검토건명	지붕형 자전거 보관대 설치 검토건	검토기간	2018.11. ~2018. 12
검 토 자	보조감리원 이용빈	시 공 사	(주)대우건설 외 4개사
공 사 명	서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사
제 목	유관기관 협의결과에 따른 지붕형 자전거 보관대 설치에 대한 실정보고
1. 검토목적 ◦ 개통대비 도로복구(지붕형 자전거 보관대 설치)와 관련하여 강동구청 공문 교통행정과-76776호 (2018.11.08), 도시기반시설본부-18-12875호(2018.11.09) 에 의거 유관기관(강동구청) 협의사항을 반영한 지붕형 지상식 자전거 보관대 설치에 대한 실정보고를 검토함 2. 관련근거 ◦ 공문 강동구청 교통행정과-46610호(2018.07.20) “서울지하철 9호선3단계 922공구 건설공사 도로시설물 원상복구계획 관련 의견 제출” → 동북중고등학교 출입구 앞 100대 주차 자전거 보관대 설치 요청 ◦ 공문 강동구청 교통행정과-76776호(2018.11.08) “서울지하철 9호선3단계 922공구 지붕형 자정거 보관대 설치요청” → 동북중고등학교 출입구 앞 100대 주차 지붕형 자전거 보관대 설치 요청 3. 검토내용 1) 추진경과 ∙ 2018.07.17 : 서울지하철 9호선3단계 922공구 건설공사 도로시설물 원상복구 계획 제출(도시기반시설본부→강동구청) ∙ 2018.07.23 : 922공구 건설공사 도로시설물 원상복구 계획 관련 의견 제출 (강동구청→도시기반시설본부) ∙ 2018.07.24 : 922공구 도로시설물 원상복구계획 검토요청 (도시기반시설본부→감리단, 시공사) ∙ 2018.11.08 : 서울지하철 9호선3단계 922공구 지붕형 자전거 보관대 설치요청 (강동구청→도시기반시설본부) ∙ 2018.11.09 : 922공구 지붕형 자전거 보관대 설치 검토요청(강동구) (도시기반시설본부→감리단, 시공사)

2) 변경사유 검토

◦ 강동구 교통행정과 협의 반영

∙ 효율성 및 이용률 고려하여 동북중고등학교 출입구 앞에 자전거 보관대 추가 설치

(190대→290대)

∙ 학생 및 학부모 지속적인 민원 요청 및 이용률 고려하여 동북중고등학교 앞에

지붕형 자전거 보관대 설치

3) 지붕형 자전거 보관대 현황도

구분	지붕형 자전거 보관대
현황도

4) 관련법규 검토

◦ 입찰안내서 제3장 계약조건 (공사계약일반조건) Ⅶ. 계약금액의 조정

2. 대형공사의 설계변경으로 인한 계약금액의 조정

다. 2) 발주기관 외에 당해공사와 관련된 인허가기관 등의 요구가 있어 이를 발주기관  이 수용하는 경우

5) 변경내용

공종명	단위	변 경 내 용			비 고
		당 초	변 경(안)	증･감
지붕형 자전거 보관대	조	-	10	10	1조당 10대

6) 변경금액                                                 (단위 :백만원)

구 분	변 경 내 용
	당 초	변 경	증･감
직접비	-	24	24
간접비	-	3	3
합 계	-	27	27

7) 단가산출

◦ 강동구청 납품 조달단가 적용

4. 검토결과

◦ 입찰안내서 『제3장 계약조건(공사계약일반조건) Ⅶ. 계약금액의 조정 2. 대형공사의 설계변경으로 인한 계약금액의 조정  다. 2)항 발주기관 외에 당해공사와 관련된 인허가기관 등의 요구가 있어 이를 발주기관이 수용하는 경우』에 의거 실정보고와 같이 지붕형 자전거 보관대를 설치하고 설계변경 반영함이 타당할 것으로 판단됨.

- 설치대수 : 100대(10조)

- 소요비용 : 27백만원

붙  임 :  1. 내역서 1부.

붙임 :       2. 관련도면 1부.

3. 단가산출근거 1부.

4. 변경근거(입찰안내서 및 공문) 1부. 끝.

2018. 12. 03.

서울지하철9호선 3단계 922공구 건설공사

책임건설사업관리기술자   신   정   묵   (인)