검 토 의 견 서

○ 검토건명 : PEM옹벽 정산

○ 공 사 명 : 용비교-행당중간 도로개설공사

1. 실정보고 사유

-.교량 방호벽의PEM옹벽에 대하여 현지여건 등에 맞추어 시공하고 정산처리

2. 검토내용

1)현황

구 분	내 용
전경사진

당초 PEM옹벽 설치구간

당초 PEM옹벽 설치구간

-.시점보도부의 PEM옹벽이 기존보도와의 연결시 적정구배 적용이 곤란하고 이용자들의 불편을 최소화 하기 위하여 시․종점구간을 현지여건에 맞추어 시공

2)수량 증감 현황

공 종	규격	단위	당초	변경	증.감	비고
가.암절개면 보호식재공	T=15cm	㎡	49	-	-49
나.PEM옹벽		㎡	546	491	-55
다.U형플륨관설치	Φ300	본	16	-	-16

3. 공사비 검토

1)적용단가

-.기존 계약단가 적용

2)공사비 증감

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
가. 토공	3,020	-	-3,020
나. 배수공 및 옹벽	282,526	253,699	-28,827
순공사비	285,546	253,699	-31,847
제 잡 비	66,979	59,415	-7,564
물가변동비	4,975	2,586	-2,389
도급공사비	357,500	315,700	-41,800

4. 검토의견

-.상기 내용과 같이 현지여건에 맞추어 시공한 PEM옹벽에 대하여 정산처리하는 것은 타당하다고 사료됩니다.

2016. 05.

검토자  책임감리원  장 현 종