검 토 의 견 서
공 사 명	겸재교건설 및 연결도로 확장공사
제 목	서울가든아파트 민원 추가요구사항 처리계획 검토보고

1. 검토목적

겸재교 건설 및 연결도로 확장공사를 수행함에 있어 동대문구 서울가든아파트 민원 추가요구사항 처리계획 실정보고건에 대하여 검토하고자 함.

2. 공사개요

○ 공 사 명 : 겸재교건설 및 연결도로 확장공사

○ 위    치 : 동대문구 휘경동 휘경여중고 삼거리 ~ 중랑구 면목동 동2로 사거리

○ 공사기간 : 2008.10.23 ~ 2016.12.31

○ 총도급액 : ₩31,006,000,000원

○ 시 공 자 : (주)한진중공업, (주)서우건영

○ 감 리 자 : (주)동일기술공사, (주)건화

○ 공사규모

- 총 연 장 : L=945m

․ 도로확장 : B=20~25m → 30m,  L=750m

․ 주 교 량 : B=18.24m,   L=235m,          ․ 접 속 교 : B=9.0m,   L=160m

․ 접속램프 : 2개소,                         · 보도육교 : 2개소.

3. 관련근거 및 공문

1) 공사계약일반조건 제19조(설계변경 등), 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

2) 서아내 16-7-1호(2016.07.13) : 겸재교 보상공사 미처리 공사에 대한 처리요구건

3) 겸재2016-103호(2016.09.07) : 실정보고서 제출(가든아파트 추가요구사항 검토보고)

4. 서울가든아파트 추가요구사항(민원)

구분	서울가든아파트 요구사항	수용여부	조 치 사 항	비 고
1	- 어린이놀이터 벤치 3개소 설치 어린이놀이터 안전수칙표지판 설치	⌾	- 어린이놀이터 : 벤치3개소, 안전 수칙표지판 1개소 설치
2	- 아파트 방화문 도색 등 - 기타 수량증감(주차구획선 조정 등)	⌾	- 아파트 방화문 도색 - 주차구획선 조정

o 추가 요구사항

o 서울가든아파트 위치도(서울시 동대문구 휘경동 겸재로 24)

가든아파트

5. 검토내용

구 분	요 구 사 항	주 요 검 토 내 용		비 고
시설물	- 벤치 3개소 - 안전수칙표지판 1개소	- 벤치 3개소 및 안전수칙표지판 1개소 설치 (디자인 및 형식 : 아파트 주민과 협의 결정)
놀이터	시설물 설치 전		시설물 설치 후

1) 어린이놀이터 벤치 및 안전수칙표지판 검토

[디자인 및 형식(벤치 및 안전수칙표지판)]

설 치 위 치	디자인 및 형식(벤치 및 안전수칙표지판)
	<규격 : 1800×650×820> 의 자 : 3개소	<규격 : 690×1600> 안전수칙표지판 : 1개소

안전수칙표지판

의자설치(3개)

2) 아파트 방화문 도색 및 기타 수량 증감(주차구획선 조정)

구분	요 구 사 항	주 요 검 토 내 용		비 고
도색	- 아파트 방화문 도색 기타 수량증감(주차구획선 조정)	- 방화문 도색 추가 반영(증 133m2) - 주차구획선 추가 반영(증 187m2)
방화문	현 황(당초 도색전)		도 색 후
주차구획선	현 황(당초 도색전)		도 색 후

3) 주요공종 증·감 현황

구 분		단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증·감
놀이터	벤 치	개소	-	3	증 3
	안전수칙표지판	개소	-	1	증 1
도 색	현관문도색(유성)	m2	672	805	증133
	차선도색(주차구획선)	m2	152	339	증187
기타	장 비 비(크레인)	hr	480	459	감 21

4) 적용 단가 산출 적정성 검토

가. 기존비목 : 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ①항 1호에 의거 계약단가 적용.

나. 신규비목 : 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ①항 2호에 의거 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰율 곱한 금액을 적용.

5) 변경내용(공사비 증·감)

공 종	규격	단위	당 초		변 경		증·감
			수량	금액(천원)	수 량	금액(천원)	수 량	금액(천원)
<부 대 공>				37,083		44,628		7,545
.4.30 가든아파트 민원				37,083		44,628		7,545
.. 현관문 도색		m2	672	8,022	805	9,609	133	1,587
.. 장비비(크레인)		hr	480	25,093	459	23,995	-21	-1,098
.,차선도색(융착성/실선,백색)	R5	m2	152	3,968	272	7,102	120	3,133
.,차선도색(융착성/실선,황색)	R4	m2	-	-	67	1,862	67	1,862
.. 벤치 설치		ea	-	-	3	1,718	3	1,718
.. 안전수칙표지판 설치		ea	-	-	1	341	1	341
직접공사비				37,083		44,628		7,545
제경비				12,817		14,872		2,055
도 급 비				49,900		59,500		9,600

6. 검토의견

o 상기와 같이 서울가든아파트 민원 추가요구사항에 대하여 검토결과 민원해소 차원에서 조속히 처리토록 하고, 추후 설계변경시 반영 조치함이 타당하다고 사료됨. 끝.

검 토 자	겸재교건설 및 연결도로 확장공사 책임감리단 책임감리원 : 이 봉 우