(주)포스코엔지니어링 (주)동일기술공사	감리 검토의견서	2014. 12
공 사 명	월드컵대교 건설공사
검 토 건 명	분류하수관 보호공(F구간)선형변경으로 인한 상부구조물 실정보고

▢ 공사개요

○ 공 사 명  : 월드컵대교 건설공사

○  개    요 : 폭 31.4m(왕복 6차로), 연장 1.98km

○  도 급 액 : 176,063백만원

○  공사기간 : 전체 : 2010.03.22 ~ 2015.08.22(66개월)

○  시 공 사 : 삼성물산(주)외 2개사

○  감 리 사 : (주)포스코엔지니어링외 1개사

▢ 검토내용

월드컵대교 건설공사 북단IC R-C 분류하수관 보호공 공사중 기존 분류하수      관 선형이 당초 설계와 상이하여 해당구간 선형변경 및 상부슬래브에 대한      검토.

▢ 관련근거 및 추진경위

‘14.03월	: 지장물확인 및 기존 분류하수관 선형 확인굴착 시행 → 설계와 선형이 상이한 것을 확인
‘14.04.23	: 분류하수관 보호공 F구간 시공계획(변경)보고
‘14.04.23	: 분류하수관 F구간 변경계획 승인
‘14.05.02	: 분류하수관 보호공 F구간 복합말뚝 변경 및 협소구간 강관말뚝 지지력 검토보고
‘14.05.12	: 기술지원감리 검토결과 통보(승인)
‘14.09.22	: 변경설계 용역완료

▢ 공사비 증·감 내역

단위 : 천원

공 종	규 격	단위	당 초		변 경		증 . 감		비 고
			수량	금 액	수량	금 액	수량	금 액
공사비계		식	1	5,058,818	1	5,339,090	1	280,272
부가가치세				505,882		533,910		28,028
도급액				5,564,700		5,873,000		308,300
관급자재비				1,939,563		2,024,400		84,837
총공사비				7,504,263		7,897,400		393,137

▢ 위치도

차집관거 실제선형과 설계선형 상이구간

(F구간 분류하수관 보호공 변경 불가피)

▢ 주요 변경사항

구 분		당 초	변 경	비 고
F구간 【기존 암거 선형과 설계선형 상이】
연 장		34M	50M	1.5배
면 적		557㎡	807㎡	〃
말뚝	복합	82	111
	강관	-	1
구조물두께		1.5m	2.1m

▢ 공사비 세부변경

			(단위:천원)
구 분		공 종		단위	당 초		변 경		증 감		비 고
					수량	금액	수량	금액	수량	금액
도급 공사비	하부공사	복합 말뚝	말뚝항타	공	82	520,605	111	704,729	29	184,124
			두부보강	공	82	28,380	111	39,653	29	11,273
		강관 말뚝	말뚝항타	M			25	12,166	25	12,166
			두부보강	공			1	342	1	342
		기타(시험비,이음비등)				6,228		14,024		7,796
	상부공사	역T형 거더	역T형	개소	486	3,513,236	499	3,445,609	13	-67,627
			현장제작	개소			2	75,528	2	75,528
		슬라브 및 구조물		㎥	10,889	990,369	11,226	1,047,039	337	56,670
	공 사 비					5,058,818		5,339,090		280,272
	부 가 세					505,882		533,910		28,028
	공사비계					5,564,700		5,873,000		308,300
관급 공사비	철근			ton	1,228	1,041,478	1,293	1,096,903	65	55,425
	레미콘			㎥	10,889	898,085	11,226	927,497	337	29,412
	관급비계					1,939,563		2,024,400		84,837
합 계						7,504,263		7,897,400		393,137

▢ 검토결과

월드컵대교 분류하수관 차집관거 선형이 설계서와 상이한 Ramp-C F구간은 현장여건에 맞추어 구조물을 연장(34M → 50M)시공하고, 공장제작이 불가한 상부구조물에 대해서는 현장에서 제작하는 것이 원활한 공정진행에 적정하며, 추후 설계변경시 반영하는 것이 타당하다고 사료됨.