설계변경 사전 검토의견

1. 본선교 P11 및 DRB P1 상수도 이설

2. 본선 P11, 남북연결도로 지하차도 터파기공법 변경

3. 남북간연결도로 선형변경 및 공사용 가교 설치

2015. 04

강남순환 도시고속도로(4공구) 건설공사

검 토 의 견 서

1. 공    사    명 : 강남순환 도시고속도로(4공구) 건설공사

2. 공  사  위  치

: 서울시 금천구 독산동~경기도 광명시 소하동~서울시 금천구 시흥동

3. 총  공  사  비 : 168,866백만원

4. 공  사  기  간 : 2001. 12. 29 ~ 2016.05.19

5. 도    급    자 : 글로웨이(주)

6. 공  사  개  요

공 종			단 위	수 량	비 고
본선	토 공	흙 쌓 기	㎥	65,247
		흙 깍 기	㎥	14,811
	구조물공	본 선 직 결 로	개소/M	1/575
		본선직결연결로	개소/M	1/244
		램 프 교	개소/M	5/1,680
		도시 계획 도로	개소/M	2/1,022
	포 장 공	보 조 기 층	㎥	20,574
		기 층	㎡	60,581
		중 간 층	㎡	54,461
		표 층	㎡	75,262
	하 천 공 사		식	1
	배 수 공	배 수 암 거	개소/M	5/242
		배 수 관	개소/M	15/1,590
	옹 벽 공		개소/M	11/1,435
	지 하 보 차 도 공		개소/M	1/760
	지 장 물 공		식	1
	조 경 공		식	1
기아대교 개수공사			식	1

7. 설계변경 심의 내용

□ 본선교 P11 및 DRB P1 상수도 이설

1) 주요물량 변경 현황

① 본선교 P11

공 종	단위	당초		변경		증.감	비고
		규격	수량	규격	수량
남부수도사업소	m			D200	84.04	84.04
철재상가	m			D100	156.24	156.24
	m			D150	121.90	121.90

② DRB P1

공 종	단위	당초		변경		증.감	비고
		규격	수량	규격	수량
광명시	m			D80	16.50

2) 적용단가 검토

⦁ 신규단가 적용

3) 공사비 변경 현황

비 목	당 초	변 경	증,감	비 고
총공사비		75,350,000	75,350,000
순공사비		59,634,692	59,634,692
제 잡 비		15,715,308	15,715,308
본선교 P11		57,815,478	57,815,478
DRB P1		1,819,214	1,819,214

□ 본선 P11,남북연결도로 지하차도 터파기 공법 변경

1) 주요물량 변경 현황

공 종	단 위	당 초	변 경	증(감)	비 고
터파기/육상발파암(인력10%)	㎥	1,643	-	1,643	P11
터파기/미진동굴착(TYPE-1,기계적파쇄)	㎥	-	1,643	1,643
터파기/육상발파암(인력10%)	㎥	2,453	-	2,453	지하차도
터파기/미진동굴착(TYPE-1,기계적파쇄)	㎥	-	2,453	2,453

2) 적용단가 검토

⦁ 신규단가 적용

3) 공사비 변경 현황

비 목	당 초	변 경	증(감)	비고
총 공사비	186,000,000	568,000,000	382,000,000
순공사비	147,463,615	449,900,544	302,436,929
제잡비	38,536,385	118,099,456	79,563,071

□ 남북연결도로 선형변경 및 공사용 가교 설치

1) 주요물량 변경 현황

구 분			당 초	변 경	비고
납북간 연결도로	연 장		U-TYPE 61m, BOX-TYPE 60m 계 121m	U-TYPE 59.45m, BOX-TYPE 61.46m 계 121m
	부상방지앵커		D=127mm, L=10m 18본	-	기술지원감리 원검토서첨부
	단면	U- TYPE			변경없음
		BOX- TYPE
공사용가교설치	공사용가교		-	B=6m, L=35m
	옹벽공		H=4.5m, L=9.6m	H=4.5m, L=2.9m
	지장물공	가설방음벽	-	H=3.5m, L=109m
		콘크리트 포장	-	t=20cm, L=141㎡
		콘크리트 깨기	-	t=20cm, A=77㎡
		아스콘 깨기	-	t=20cm, A=147㎡
		우수관이설	-	D=600, L=58m

2) 적용단가 검토

⦁ 기존단가 적용

기존 계약 공종인 남북간 연결도로,도로포장공,옹벽공,가설방음벽

⦁ 신규단가 적용

3) 공사비 변경 현황

비 목	당 초	변 경	증(감)	비고
총공사비	1,933,000,000	2,192,000,000	259,000,000
제잡비	408,904,726	464,028,772	55,124,046
순공사비	1,524,095,274	1,727,971,228	203,875,954
남북간연결도로 선형변경	1,417,787,790	1,399,869,273	17,918,517
본선교P11 및 남북간 연결도로 가교복공	106,307,484	328,101,955	221,794,471

□ 신규단가 검토

- 강남순환 본선 신규단가 협의율 82.25% 적용

① 시책사업부-13283(2009.11.18) : 강남순환 도시고속도로(4공구) 건설공사 협의율 검토요청(82.25%)

② 임광(강남)제2009-191(2009.11.23) : 본선부 설계변경에 따른 협의율 검토 회신(82.25% 수용)

8. 결론

- 강남순환 도시고속도로(4공구) 건설공사 관련하여 공사계약 일반 조건 제19조에 의하여 현장 실정 보고 후 발주처 승인 완료

- 신규단가 협의는 계약 당사자간 협의율 82.25%로 합의 완료한 상태로서,

- 설계변경(소)심의위원회에 상정하여 그 결과에 의거 설계변경 시 정산 반영코져 함.