	주식회사	동일기술공사

우.158-841 서울시 양천구 신월6동 1014-7 혜성빌딩 2층/ 전화:(02)2615-5915/ 팩스:(02)2615-5920/ 담당:김한수

문서번호	:	서지(감)제14-416호		선결				지시
				접수	일시			결재 ․ 공람
시행일자	:	2014. 08. 28.
					번호
수 신	:	서울특별시 도시기반시설본부장
				처 리 과
참 조	:	설비부장
				담 당 자
제 목	:	전기공사(3차, 총차) 준공기한 연장 검토보고

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서지(금)-2014-015, 016호(2014.08.27)와 관련입니다.

3. 「서부트럭터미널앞 지하차도 건설 전기공사」(3차, 총차)의 준공기한 연기요인이 발생하여 위호로 붙임과 같이 준공기한을 연기하고, 서부트럭터미널 지하차도 전기실(수전용량 : 1,150KW) 안전관리자를 주간근무(종전 야간근무)로 선임하여 연기되는 공사 준공기한까지 관련 법률(전기사업법 제 73조)에 의한 관리를 하고자 검토보고 하오니 조치하여주시기 바랍니다.

붙    임 :  가. 감리검토의견서 1부

나. 공사 준공기한 연기원 1부.  끝.

서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사 책임감리원  윤  부  영

	주식회사	동일기술공사

우.158-841 서울시 양천구 신월6동 1014-7 혜성빌딩 2층/ 전화:(02)2615-5915/ 팩스:(02)2615-5920/ 담당:김한수

문서번호	:	서지(감)제14- 417호		선결				지시
				접수	일시			결재 ․ 공람
시행일자	:	2014. 08. 28.
					번호
수 신	:	서울특별시 도시기반시설본부장
				처 리 과
참 조	:	설비부장
				담 당 자
제 목	:	통신공사(3차, 총차) 준공기한 연장 검토보고

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 삼삼14-082801, 082802호(2014.08.28)와 관련입니다.

3. 「서부트럭터미널앞 지하차도 건설 통신공사」(3차, 총차)의 준공기한 연기요인이 발생하여 위호로 붙임과 같이 준공기한 연장 서류가 접수되어 검토 보고하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙    임 :  가. 감리검토의견서 1부

나. 공사 준공기한 연기원 1부.  끝.

서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사 책임감리원  윤  부  영

	주식회사	동일기술공사

우.158-841 서울시 양천구 신월6동 1014-7 혜성빌딩 2층/ 전화:(02)2615-5915/ 팩스:(02)2615-5920/ 담당:김한수

문서번호	:	서지(감)제14- 418호		선결				지시
				접수	일시			결재 ․ 공람
시행일자	:	2014. 08. 28.
					번호
수 신	:	서울특별시 도시기반시설본부장
				처 리 과
참 조	:	설비부장
				담 당 자
제 목	:	신호공사(3차, 총차) 준공기한 연장 검토보고

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우남2014-093, 094호(2014.08.27)와 관련입니다.

3. 「서부트럭터미널앞 지하차도 건설 신호공사」(3차, 총차)의 준공기한 연기요인이 발생하여 위호로 붙임과 같이 준공기한 연장 서류가 접수되어 검토 보고하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙    임 :  가. 감리검토의견서 1부

나. 공사 준공기한 연기원 1부.  끝.

서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사 책임감리원  윤  부  영

검 토 의 견 서

공 사 명	서부트럭 터미널 앞 지하차도 건설 전기공사(3차, 총차)
검토 건 명	3차, 총차 공사 준공기한 연장 검토
관련근거 공문	서지(금)-2014-015, 016호(2014.08.27)
검토 기간	2014. 08. 27. ~ 2014. 08. 28.
검 토 자	전기 담당 감리원 김한수

■ 검토목적

「서부트럭터미널 앞 지하차도 건설 전기공사」시행중 선행공사(토목) 공기연장으로 인하여 준공기한 연장이 필요한 실정으로서 이에 대한검토 및 전기설비 안전관리자 선임의 적정성을 검토 하고자 함.

■ 공사현황

○ 공 사 명 : 서부트럭터미널앞 지하차도 건설 전기공사(3차)

○ 도급금액 :  2,418,360,000원(3차), 2,985,360,000원(총차)

○ 공사개요 : 지하차도 L=1,075m[BOX 950(방음터널 210m 포함) U-TYPE 125m]      ○ 공사기간 : 당초 : 2012. 07.  19 ∼ 2014.  08.  29.(3차)

2010. 12.  15 ∼ 2014.  08.  29.(총차)

변경 : 2012. 07.  19 ∼ 2014.  10.  15(3차)

2010. 12.  15 ∼ 2014.  10.  15(총차)

○ 시 공 사 : (주) 금호전력

○ 감 리 사 : (주)동일기술공사 외 1개사

■ 3차공사 공정율 현황                                (2014. 08. 25기준)

구 분	계 획(%)	실 적(%)	대 비(%)	비 고
3차 공사	100.0	99.2	98.2	선행 공정 준공기한 연기
총차 공사	100.0	99.4	99.4	선행 공정 준공기한 연기

■ 준공기한 연장 및 안전관리자 선인 연기 사유

선행공사(토목) 공기연장으로 인하여 부분적으로 공사 진행이 불가능한 사유가 발생 하 여 공사를 준공할 수 없으므로 공사 준공기한 까지 전기설비 안전관리자를 선임하고자 함

■ 검토의견

선행공사 토목공사(7차) 준공기한 2014.10.15일로  연장되어 후속공정인 전기공사 (3차, 총차)의 준공기한을 아래와 같이 연장 추진하여 공정에 차질이 없도록 시행하고, 전기공사 준공기한까지 전기설비에 대하여 전기사업법 제 73조에 따라 시공사에서 안전 관리자를 선임하여 주간근무(종전 야간근무)로 관리함이 타당하다고 사료됨.

-   아        래   -

공사명		공사기간(3차 공사)				공기 연장일
		당 초		변 경
		공사기간	일수	공사기간	일수
서부트럭터미널 앞 지하차도 건설 전기공사	3차	2012.07.19~ 2014.08.29	772일 (25.7개월)	2012.07.19~ 2014.10.15	819일 (27.3개월)	증 : 47일 (1.5개월)
	총차	2010.12.15~ 2014.08.29	1,351일 (45.1개월)	2010.12.15~ 2014.10.15	1,398일 (46.6개월)	증 : 47일 (1.5개월)

붙  임 : 공사 준공기한 연기원 사본 1부

검 토 자  : 책임감리원  윤   부   영

검 토 의 견 서

공 사 명	서부트럭 터미널 앞 지하차도 건설 통신공사(3차, 총차)
검토 건 명	3차, 총차 공사 준공기한 연장 검토
관련근거 공문	삼삼14-082801, 082802호(2014.08.28)
검토 기간	2014. 08. 28. ~ 2014. 08. 28.
검 토 자	전기 담당 감리원 김한수

■ 검토목적

「서부트럭터미널 앞 지하차도 건설 통신공사」시행중 선행공사(토목) 공기연장으로 인하여 준공기한 연장이 필요한 실정으로서 이에 대한 적정성을 검토 하고자 함.

■ 공사현황

○ 공 사 명 : 서부트럭터미널앞 지하차도 건설 통신공사(3차)

○ 도급금액 :  775,281,630원(3차),   795,281,630원(총차)

○ 공사개요 : 지하차도 L=1,075m[BOX 950(방음터널 210m 포함) U-TYPE 125m]      ○ 공사기간 : 당초 : 2012. 07.  16. ∼ 2014.  08.  29.(3차)

2010. 11.  29. ∼ 2014.  08.  29.(총차)

변경 : 2012. 07.  16. ∼ 2014.  10.  15.(3차)

2010. 11.  29. ∼ 2014.  10.  15.(총차)

○ 시 공 사 : (주) 삼삼통신기술

○ 감 리 사 : (주)동일기술공사 외 1개사

■ 3차 공사 공정율 현황                                (2014. 08. 25기준)

구 분	계 획(%)	실 적(%)	대 비(%)	비 고
3차 공사	100.0	99.8	99.8	선행 공정 준공기한 연기
총차 공사	100.0	99.9	99.9	선행 공정 준공기한 연기

■ 준공기한 연장 사유

선행공사(토목) 공기연장으로 인하여 부분적으로 공사 진행이 불가능한 사유가 발생 함

■ 검토의견

선행공사 토목공사(7차) 준공기한 2014.10.15일로  연장되어 후속공정인 통신 공사(3차, 총차)의 준공기한을 아래와 같이 연장 추진하여 공정에 차질이 없도록 시행함이 타당하다고 사료됨.

-   아        래   -

공사명		공사기간(3차 공사)				공기 연장일
		당 초		변 경
		공사기간	일수	공사기간	일수
서부트럭터미널 앞 지하차도 건설 통신공사	3차	2012.07.16~ 2014.08.29	775일 (25.6개월)	2012.07.16~ 2014.10.15	812일 (27.1개월)	증 : 47일 (1.5개월)
	총차	2010.11.29~ 2014.08.29	1,368일 (45.6개월)	2010.11.29~ 2014.10.15	1415일 (47.1개월)	증 : 47일 (1.5개월)

붙  임 : 공사 준공기한 연기원 사본 1부

검 토 자  : 책임감리원  윤   부   영

검 토 의 견 서

공 사 명	서부트럭 터미널 앞 지하차도 건설 신호공사(3차, 총차)
검토 건 명	3차, 총차 공사 준공기한 연장 검토
관련근거 공문	우남2014-093, 094호(2014.08.27)
검토 기간	2014. 08. 27. ~ 2014. 08. 28.
검 토 자	전기 담당 감리원 김한수

■ 검토목적

「서부트럭터미널 앞 지하차도 건설 신호공사」시행중 선행공사(토목) 공기연장으로 인하여 준공기한 연장이 필요한 실정으로서 이에 대한 적정성을 검토 하고자 함.

■ 공사현황

○ 공 사 명 : 서부트럭터미널앞 지하차도 건설 신호공사(3차)

○ 도급금액 :  267,520,000원

○ 공사개요 : 지하차도 L=1,075m[BOX 950(방음터널 210m 포함) U-TYPE 125m]      ○ 공사기간 : 당초 : 2012. 07.  17. ∼ 2014.  08.  29.(3차)

2010. 11.  29. ∼ 2014.  08.  29.(총차)

변경 : 2012. 07.  17. ∼ 2014.  10.  15.(3차)

2010. 11.  29. ∼ 2014.  10.  15.(총차)

○ 시 공 사 : 우남전설(주)

○ 감 리 사 : (주)동일기술공사 외 1개사

■ 3차 공사 공정율 현황                                (2014. 08. 25기준)

구 분	계 획(%)	실 적(%)	대 비(%)	비 고
3차 공사	100.0	99.8	99.8	선행 공정 준공기한 연기
총차 공사	100.0	99.9	99.9	선행 공정 준공기한 연기

■ 준공기한 연장 사유

선행공사(토목) 공기연장으로 인하여 부분적으로 공사 진행이 불가능한 사유가 발생 함

■ 검토의견

선행공사 토목공사(7차) 준공기한 2014.10.15일로  연장되어 후속공정인 신호 공사(3차, 총차)의 준공기한을 아래와 같이 연장 추진하여 공정에 차질이 없도록 시행함이 타당하다고 사료됨.

-   아        래   -

공사명		공사기간(3차공사)				공기 연장일
		당 초		변 경
		공사기간	일수	공사기간	일수
서부트럭터미널 앞 지하차도 건설 신호공사	3차	2012.07.17~ 2014.08.29	774일 (25.6개월)	2012.07.17~ 2014.10.15	811일 (27.1개월)	증 : 47일 (1.5개월)
	총차	2010.11.29~ 2014.08.29	1,368일 (45.6개월)	2010.11.29~ 2014.10.15	1,415일 (47.1개월)	증 : 47일 (1.5개월)

붙  임 : 공사 준공기한 연기원 사본 1부

검 토 자  : 책임감리원  윤   부   영