감사원 부실감리 적발 현황(최근 5년간)

서울특별시

일 자	사업(계약)명 (감사원 지적사항)	사업기간	감리업체명	대표자명	감리용역 계약금액 (백만원)	부실(적발)내역	처분결과
‘11. 6. 7	여의도샛강 생태공원 조성공사 (여의도샛강 생태공원 조성공사 설계변경 부적정)	‘08. 7.29~ ’10. 5.20	㈜▽▽▽▽ ▽▽	○○○	1,729	○ 토사 운반비와 폐기물 처리비 등 설계변경 및 공사비 감액업무 등을 잘못 처리하여 발주처에 손해를 끼치고 검측서를 허위로 작성하는 등 준공검사업무를 부당하게 처리	업무정지 34일
‘11. 6. 7	은평뉴타운 환경플랜트 건설사업 (하도급 적정성 심사 처리 부적정)	‘06. 6.22~ ’11. 9. 3	㈜◎◎◎◎ ◎◎◎	◇◇◇	2,685	○ 시공사에서 직접 시공하지 않고 시공능력이 떨어지는 하도급 업체로 하여금 타일공사 등을 부실시공하게 하였는데도 하도급 관리를 소홀히 하는 등 책임감리업무 불성실	경고
‘11. 6. 7	여의도샛강 생태공원 조성공사 (여의도샛강 생태공원 조성공사의 불법하도급 신고 처리 부적정)	‘08. 7.29~ ’10. 5.20	㈜▽▽▽▽ ▽▽	□□□	1,587	○ 하도급 관리 등 감리업무를 성실하게 수행하지 않아 호안사석공사를 부실 시공	업무정지 34일
‘12. 4.23	장안동 비와이씨 위더스빌 신축공사 등 27개 사업 (소방공사감리업 감독 부적정) ※ 세부내역 별첨	‘09. 7.17~ ‘11. 3.24	㈜○○○○ ○○ 등 23개 업체	△△△ 등	8,375	○ 소방시설공사 기간 중 공사현장을 이탈하여 해외에 체류하고 있었는데도 감리업무를 수행한 것처럼 보고	경고 13개 영업정지 7개 무혐의(위반사실 없음) 3개