품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 강남순환도시고속도로8공구                              점검일 : 2016. 7. 12 ~ 7. 13

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
2. 현장품질 방침 및 목표	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전 직원의 참여를 위한 동기부여 여부	◦ 품질방침 및 목표를 전 직원(기능공 포함)이 볼 수 있는 곳에 게시하고 주기적 교육을 통해 품질활동에 참여 할 수 있도록 유도하시기 바라며 그 결과를 기록관리 바람.	시정 검토
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호 상태	◦ 보관문서 목록표 작성 시 문서분류 체계에 따라 문서의 보관 위치, 보관형태(방법), 보존년한, 관리책임자, 문서 특성에 맞는 보안등급을 지정 관리할 수 있도록 양식을 변경 바람. ◦ 문서총괄책임자는 현장 내에서 생산·관리되는 모든 문서에 대해 주기적(월 1회)으로 보안점검을 실시하고 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
9. 설계변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경 사항(특히 경미한 변경) 에 대하여는 변경내용을 관련 공종 참여자(기능공 포함)에 대해 교육을 실시한 후 작업에 투입될 수 있도록 조치하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 화물터미널 앞 지하차도 차수 그라우트(ASG공법)의 주입효과 시공 확인 방법 및 기준과 관련된 내용이 불명확하므로 향후 공사 진행은 관리기준 및 시공확인 방법을 명확히 하여 품질 관리를 시행토록 하시기 바람. - 시공확인은 육안확인 및 원위치 시험 방법이 있는데 본 현장 적용 방법을 결정하여야 함(원위치 시험 방법) - 시공 관리 기준은 시험횟수에 대한 명확한 기준을 결정 하여야 함(50m 당 1회 또는 100m 당 1회) - 품질관리계획서는 감리자의 승인을 득한 서류로 보관 ◦ 화물터미널 앞 지하차도 복공 자재 적재는 품질에 문제가 발생하지 않도록 과다 적재를 하지 말고, 복공 자재(재사용) 의 부분 변형이 발생된 부위는 보강조치 후 사용토록 해야함 ◦ 본선 고가교 P7 하부 프리캐스트 옹벽 상부 비탈면이 임시 비탈면으로 형성되어 있어 집중 호우 시 비탈면 안정에 문제 가 발생될 수 있으므로 유실방지를 위한 별도의 보강 조치를 강구토록 해야 하며 접속부 구간도 토사유실 등의 안정 저해가 예상되므로 조속히 보강조치를 강구토록 해야 됨. ◦ 주암교 교대 뒤채움부가 불량하여 집중 호우 시 안정에 문제 가 발생될 수 있으므로 별도의 보강 조치를 강구토록 해야 하며 양수기를 상시 조치토록 하여 양수토록 해야 함. ◦ 주암교 교대 주변 비탈면 상태가 토사 유실이 상당히 발생된 상태로서 집중 호우 시 안정에 문제가 발생될 수 있으므로 별도의 보강 조치를 강구토록 해야 함. ◦ RC옹벽 배수 필터의 시공 높이가 옹벽 상단에서 많이 이격되어 있어 최종 뒤채움 시 배수 기능에 문제가 예상되므로 배수 필터 높이를 여장하여 시공토록 해야 함. ◦ STA.0+700(수서방향) 임시비탈면 인접부지와 면해 있는 비탈면 상태가 토사 유실이 상당히 발생된 상태로서 집중호우 시 안정 에 문제가 발생될 수 있으므로 별도의 보강조치를 강구토록 해야 함.(백경종 위원) ◦ 본선 고가교 P7~P8 Slab와 벽체 접합부 및 이어치기부 마감 처리 미흡하니 보수 바람. ◦ 화원인접 하천부지 신설도로 예정지 옹벽 작업에 사용될 자재 (철근)가 바닥에 방치되어 녹 발생이 심하니 시공에 사용 시 반듯이 방청 처리 후 사용하고 현장 자재관리에 철저를 기하 시기 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“강남순환도시고속도로(8공구)건설공사”의 시공자인 롯데건설㈜와 감리자인 동명기술공단에서 제시한

문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.