강남환경자원센터 건립 사업계획

사업개요  * 모든 시설은 지하화하고 지상은 녹지화

위    치  :  강남구 율현동 141-16 외 10필지

사업기간  :  2010. 1 ~ 2013. 4

사 업 비  :  32,171백만원 (국비 30%, 시비 35%, 구비 35%)

시설용량  :  재활용품 선별시설(50톤/일), 음식물 중간 상차(집하)시설(300톤/일),

생활폐기물 사전압축시설(100톤/일) 등

시설규모  :  지상1층/지하2층 (대지면적 9,112㎡, 연면적 11,012㎡)

구 분	시설 내역	면적(㎡)
지 상	․ 홍보관, 경비실, 공용화장실 등	321
지하1중층	․ 사무실(중앙제어실), 식당, 휴게실, 샤워실 등	1,076
지하 1층	․ 재활용품 선별시설, 생활폐기물․음식폐기물 반입장 ․ 스티로폼 감용실, 전기실, 탈취시설, 세차시설	4,816
지하 2층	․ 생활폐기물 사전압축시설, 암롤 저장시설, 폐수처리시설 ․ 대형폐기물 선별장, 청소차량 주차장	4,799

추진경위

1998. 02. 28 : 사업대상부지 취득

2005. 07. 20 : 개발제한구역 관리계획 승인 (건설교통부장관)

2009. 11. 11 : 지방재정 투․융자심사(서울시)

2010. 10. 14 : 강남환경자원센터 건립 기본 및 실시설계 용역 준공

2010. 11. 01 : 강남환경자원센터 건립 공사발주 (조달청)

2011. 01. 11 : 강남환경자원센터 건립 착공

시설건립의 시급성

보금자리 주택건설 등 주변 환경변화에 따른 향후 민원 발생 예상

- 시설 주변지역에 2013년 4월 입주 목표로 보금자리 주택 4,450세대 건설 중

향후계획

2011. 04. 07 : 강남환경자원센터 건립 기공식 (14:00 예정)

국․시비 확보내역 및 연차별 재정계획

재원별

(단위 : 백만원)

구 분		계	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
계		32,171	20	3,828	8,585	15,142	4,596
국 비	계 획	9,651			3,088	4,826	1,737
	확보액	2,300			1,000	1,300	-
시 비	계 획	11,260			3,603	5,630	2,027
	확보액	2,683			1,166	1,517	-
구 비	계 획	11,260	20	3,828	1,894	4,686	832
	투입액	27,188	20	3,828	6,419	12,325	4,596

공종별

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2010년이전	2011년	2012년	2013년
계	32,171	3,828	8,585	15,142	4,596
기본계획 및 실시설계	995	995
공 사 비	29,084	2,680	7,415	14,388	4,596
설계․감리비등	1,676	168	754	754
농지전용부담금	416		416

강남구 예산 기 투입액 : 173억원(부지매입비 등）

구 재정상태 악화 및 국․시비가 당초 예상액 보다 축소 지원됨에 따라 연차별

부담액을 줄이기 위해 당초 2년 ⇒ 3년으로 공사기간 조정

위 치 도

현황사진

예산

구 분		총 사업비	‘09 까지 예산	'10 까지 예산	'11 예산	'12예산 소요내역		연차별 투자계획
						금액	산출근거	´12년	´13년
합 계		32,171	20	3,828	8,585	15,142	-	15,142	4,596
세부내역	∘기본계획	20	20	-	-	-	-	-	-
	∘기본및실시설계	975	-	975	-	-	-	-	-
	∘공사비	29,084	-	2,680	7,415	14,388	-	14,388	4,596
	- 토목,건축,기계	26,098	-	2,406	7,058	12,787	-	12,787	3,848
	- 전기공사	2,489	-	229	357	1,427	-	1,427	476
	- 소방공사	326	-	30	-	99	-	99	197
	- 통신공사	166	-	15	-	75	-	75	75
	∘조달수수료	5	-	5	-	-	-	-	-
	∘감리용역	1,676	-	168	754	754	-	754	-
	∘농지전용부담금	416	-	-	416	-	-	-	-
재원별	∘국고	9,651	-	-	1,000	6,914	-	6,914	1,737
	∘지방비	22,520	20	3,828	7,585	8,228	-		2,859
	- 시비	11,260	-	-	1,166	8,067	-		2,027
	- 구비	11,260	20	3,828	6,419	161	-		832
	∘기타	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 민자	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 기타재원	-	-	-	-	-	-	-	-