[제출서식]			우수기관	자체평가결과
			서울시 강동구	71점

작성요령 (제출시 삭제)		□우수기관 : 추천 대상 시도 또는 시군구 기재 □자체평가결과 : 평가지표 2. 사업계획 ~ 4. 사업성과 부분에 대한 평가결과 합산(1. 공통사항, 5. 가점은 제외)

2018년 교통사고 잦은 곳 개선사업

우수기관 추진실적 및 자체평가 보고서

작성요령 (제출시 삭제)		□세부 사업명 : 어린이보호구역 개선사업, 안전한 보행환경 조성사업

2018. 12.

	강동구청

2018년 추진실적 및 자체평가 보고서

□ 총괄표

평가항목	평가지표	세부평가내용		유형	배점	평점
계 (4개 평가항목 12개 평가지표)				정량 8, 정성 4	100
1. 공통사항	소계 (3개 지표)				25
(시도)	① 교통사고 감소현황	사업지구별 교통사고 감소현황		정량	10
		- 최상위 3개 시도 : 10점
		- 차상위 5개 시도 : 7점
		- 차하위 5개 시도 : 4점
		- 최하위 4개 시도 : 1점
		※ 사고가 증가한 경우, 0점 처리
	② 지역안전지수	2018년 지자체 지역안전지수(교통)		정량	10
	(교통분야)	- 1등급 : 10점, 2듭급 : 8점, 3등급 : 6점,
		4등급 : 4점, 5등급 : 2점
		※ 지역안전지수 교통분야 평가결과
	③ 자체 사업비	2018년 자체사업비로 추진한 도로교통환경개선사업		정량	5
	투자실적	투자실적 확인 (자체 사업비 / 도로부문 총예산)
		- 최상위 3개 시도 : 5점
		- 차상위 5개 시도 : 4점
		- 차하위 5개 시도 : 3점
		- 최하위 4개 시도 : 2점
		※ 자체사업비가 없을 경우, 0점 처리
2. 사업계획	소계 (3개 지표)				15
	① 대상지 선정 적정성	당초 계획된 사업지구대로 추진여부 확인		정량	5	1
		- 사업계획 변경건수 0건 : 5점
		- 사업계획 변경건수 1건 : 3점
		- 사업계획 변경건수 2건 이상 : 1점
	② 지방비 확보실적	지방비 예산 확보 등 사업준비 실적 확인		정량	5	5
		- 2분기내 전액확보 : 5점
		- 3분기내 전액확보 : 3점
		- 4분기내 전액확보 : 1점
	③ 전문기관, 주민 등	교통전문기관 자문, 주민설명회 등 외부의견		정성	5	5
	의견수렴	수렴 실적
		- 매우 우수 : 5점	- 우수 : 4점
		- 보통 : 3점	- 미흡 : 2점
		- 매우 미흡 : 1점

평가항목	평가지표	세부평가내용		유형	배점	평점
3. 사업관리	소계 (2개 지표)				25
	① 국비 집행실적	국비 실집행 실적 확인		정량	15	15
		- 90% 이상 : 15점
		- 70% 이상 ~ 89% 미만 : 12점
		- 50% 이상 ~ 70% 미만 : 9점
		- 30% 이상 ~ 50% 미만 : 6점
		- 10% 이상 ~ 30% 미만 : 3점
		- 10% 미만 : 0점
	② 모니터링체계 구축	사업추진과 예산집행에 대한 지속적인 점검과		정성	10	10
		관리가 이루어졌는지, 모니터링에 대한 피드백을
		통해 문제를 예방, 해결 또는 개선한 실적 확인
		- 매우 우수 : 10점	- 우수 : 8점
		- 보통 : 5점	- 미흡 : 3점
		- 매우 미흡 : 1점
4. 사업성과	소계 (4개 지표)				35
	① 목표달성도	계획된 공사물량 달성 여부		정량	10	10
		- 공정률 90% 이상 : 10점
		- 공정률 70% 이상 ~ 90% 미만 : 8점
		- 공정률 50% 이상 ~ 70% 미만 : 6점
		- 공정률 30% 이상 ~ 50% 미만 : 4점
		- 공정률 10% 이상 ~ 30% 미만 : 2점
		- 공정률 10% 미만 : 0점
	② 시설 안전성 평가	관련법령 및 지침 부합여부, 개선시설의 편리성,		정성	10	10
		안전성 등을 종합적으로 판단
		- 매우 우수 : 10점	- 우수 : 8점
		- 보통 : 5점	- 미흡 : 3점
		- 매우 미흡 : 1점
	③ 특수시책 및	다른 지역이 벤치마킹·학습할 수 있는 모범사례		정성	10	10
	우수사례	또는 지역 특색에 맞는 시책추진사례 등 확인
		- 매우 우수 : 10점	- 우수 : 8점
		- 보통 : 5점	- 미흡 : 3점
		- 매우 미흡 : 1점
	④ 홍보실적	신문, 방송 등 홍보실적		정량	5	5
		- 5회 이상 : 5점	- 3회~4회 : 3점
		- 1회~3회 : 2점	- 1회 미만 : 0점
5. 가점	① 교통사고 사망자	‘17년 대비 ’18년 교통사고 사망자 감소 노력도 확인		정량	5
(시도)	감소 노력도	- 사망자 감소율 최상위 3개 시도 : 5점
		- 사망자 감소율 차상위 5개 시도 : 3점
	② 지역안전지수	‘17년 대비 ’18년 지역안전지수(교통) 개선 노력도 확인		정량	5
	개선 노력도	- 2개 등급 이상 상향 : 5점
		- 1개 등급 상향 : 3점

□ 평가지표별 추진실적

평가항목

2-1 대상지 선정 적정성

배점

5

평점

1

평가방법

ㅇ(평가내용) 당초 계획된 사업지구대로 추진여부 확인

ㅇ(평점방법)

구분	배점(점)
사업계획 변경건수 0건	5
사업계획 변경건수 1건	3
사업계획 변경건수 2건 이상	1

추진실적

ㅇ(사업계획 및 추진현황)

(단위 : 개소, 건)
당초 사업계획	추진현황	변경건수
23개소	29개소	11건

ㅇ(변경 내역 및 사유)

대상 지자체	변경현황		변경사유	승인일자
	당초	변경
강동구	천호초등학교	보람나무어린이집	현장여건 어려움	2018.12.10.
	주몽학교	성내초등학교
	강동초등학교	천일초등학교
	강일늘사랑유치원	천동초등학교
	준현어린이집	한울유치원
		성내유정유치원	추가발굴
		무지개어린이집
		곡교어린이집
		강동유정유치원
		그린어린이집
		예은어린이집

※ 당초 사업계획은 23개소였으나 어린이 보호구역 통학로 안전을 도모하기 위해 최종 29개소 개선

증빙자료

ㅇ사업 대상지 확정현황 및 변경 승인공문

평가항목

2-2 ′17년 지방비 확보실적

배점

5

평점

5

평가방법

ㅇ(평가내용) 지방비 예산 확보 등 사업준비 실적 확인

ㅇ(평점방법)

구분	배점(점)
2분기내 전액확보	5
3분기내 전액확보	3
4분기내 전액확보	1

추진실적

ㅇ(지방비 확보현황)

				(단위 : 백만원)
국비	지방비 확보현황			확보율 (B/A)
	지방비(A)	확보액(B)	미확보액
	270	270	-	100%

ㅇ(지방비 확보시기)

- 본 예 산(‘16.12.31.) : 270백만원

▸ 스쿨존 보행안심 특화거리 : 100백만원

▸ 보행환경 개선사업 : 100백만원

▸ 보행자 우선도로 :  60백만원

▸ 통학로 차없는 거리 : 10백만원

증빙자료

ㅇ세출예산서

평가항목

2-3 전문기관, 주민 등 의견수렴

배점

5

평점

5

평가방법

ㅇ(평가내용) 교통전문기관 자문, 주민설명회 등 외부의견 수렴 실적 확인

ㅇ(평점방법)

구분	배점(점)
매우 우수	5
우수	4
보통	3
미흡	2
매우 미흡	1

추진실적

ㅇ(지역주민 의견수렴)

- 암사길 보행환경개선사업 주민설명회

- 천중로12길 보행자 우선도로 주민설명회

- 한산초 스쿨존 보행안심 특화거리 조성 주민설명회

ㅇ(유관부서 협의)

- 옐로카펫 설치에 따른 유관부서 협의

- 과속경보시스템 설치에 따른 유관부서 협의

ㅇ(간담회 개최)

- 보호구역 개선사업 간담회 개최

증빙자료

ㅇ용역보고서, 전문가 자문·주민설명회 결과보고서 등 관련 서류

평가항목

3-1 국비집행실적

배점

15

평점

15

평가방법

ㅇ(평가내용) 국비 실집행 실적 확인

ㅇ(평점방법)

구분	배점(점)
90% 이상	15
70% 이상 ~ 90% 미만	12
50% 이상 ~ 70% 미만	9
30% 이상 ~ 50% 미만	6
10% 이상 ~ 30% 미만	3
10% 미만	0

추진실적

ㅇ(국비집행실적)

				(단위 : 백만원)
국비 예산	국비 교부액 (A)	집행액 (B, 11. 30)	집행예정 (12월말)	이월예상	집행률 (B/A)
	294	1.1	289.3	없음	98.40%

ㅇ(집행지연사유 및 조치계획)

- 집행지연사유

2018.9.30. 추경 예산 560백만원 배정에 따라 사업비 증감발생

- 조치계획

2018.12.17. 현재 공사 준공검사 중

2018.12.26. 지출집행 완료(예정)

증빙자료

ㅇe-호조상에 기록되어 있는 예산집행현황

평가항목

3-2 모니터링체계 구축

배점

10

평점

10

평가방법

ㅇ(평가내용) 사업추진과 예산집행에 대한 지속적인 점검과 관리가 이루어졌는지, 모니터링에 대한 피드백을 통해 문제를 예방, 해결 또는 개선한 실적 확인

ㅇ(평점방법)

구분	배점(점)
매우 우수	10
우수	8
보통	5
미흡	3
매우 미흡	1

추진실적

ㅇ(모니터링)

- 2018.3.~12. 어린이보호구역 상하반기 현장점검 시행

ㅇ(외부 지적사항에 대한 조치결과)

- 2018. 9. 한산초 주변 통학로 교통안전 대책 마련

(스쿨존 보행안심 특화거리, 옐로카펫, 과속경보시스템 등)

- 2018. 11. 암사길 보행환경개선사업

(보람나무어린이집 어린이보호구역 개선)

증빙자료

ㅇ월별 추진상황 및 집행보고서, 분기별 현장점검보고서 등 모니터링 실시결과 관련 서류

ㅇ민원발생 및 외부지적사항 등에 대한 자료 및 조치결과 관련 서류

평가항목

4-1 목표달성도

배점

10

평점

10

평가방법

ㅇ(평가내용) 계획된 공사물량 달성 여부

ㅇ(평점방법)

구분	배점(점)
공정률 90% 이상	10
공정률 70% 이상 ~ 90% 미만	8
공정률 50% 이상 ~ 70% 미만	6
공정률 30% 이상 ~ 50% 미만	4
공정률 10% 이상 ~ 30% 미만	2
공정률 10% 미만	0

추진실적

ㅇ(공정률)

착공일	준공(예정)일	공정률(%, 11. 30일 기준)
2018.11.5	2018.12.26.	90%

ㅇ(공정 지연사유 및 조치계획)

- 해당없음

증빙자료

ㅇ공정계획서 등 세부추진계획서

ㅇ공정보고 등 목표치 달성여부를 입증할 수 있는 관련 자료

평가항목

4-2 시설 안전성 평가

배점

10

평점

10

평가방법

ㅇ(평가내용) 관련법령 및 지침 부합여부, 개선시설의 편리성･안전성 등을 종합적으로 판단

ㅇ(평점방법)

구분	배점(점)
매우 우수	10
우수	8
보통	5
미흡	3
매우 미흡	1

ㅇ(참고자료)

- 2018년 도로교통안전개선사업 추진지침

- 교통사고 잦은 곳 기본개선계획 및 효과분석(‘18, 도로교통공단),

회전교차로 설계지침(’14, 국토부)

- 보행업무편람(‘13), 어린이·노인·장애인 보호구역 통합지침(‘15) 등

추진실적

ㅇ 통학로 중심 이면도로 학생중심의 속도개편

▸ 대상지 : 천동초등학교 주변 (어린이보호구역 외)

▸ 사업내용 : 이면도로 차량통행속도제한30km/h, 보행로 설치, 교통안전표지 및 노면표시 등

▸ 사업비 : 20백만원(구비)

▸ 사업기간 : 2018. 7. ~ 2018. 12.

ㅇ 선사초교 외 4개소 안전한 보행환경 정비사업

▸ 위    치: 선사초, 명덕초, 묘곡초, 강일초, 강솔초

▸ 사업기간: 2018. 6. ~ 2018. 9.

▸ 사업내용: 도로포장 75.3a, 미끄럼방지포장 2,416㎡, 방호울타리 정비 619m 등

▸ 사 업 비: 400백만원(특별교부세)

증빙자료

ㅇ관련법령 및 지침 적용내용, 이용자 편리성･안전성을 판단할 수 있는 자료(위치도, 설계도서, 사진자료 등)

평가항목

4-3 특수시책 및 우수사례

배점

10

평점

10

평가방법

ㅇ(평가내용) 다른 지역이 벤치마킹·학습할 수 있는 모범사례 및 지역 특색에 맞는 시책추진사례 등 확인

ㅇ(평점방법)

구분	배점(점)
매우 우수	10
우수	8
보통	5
미흡	3
매우 미흡	1

추진실적

ㅇ(특수시책) 한산초 통학로 교통안전 확보사업

▸ 대상지 : 한산초등학교 주변

▸ 사업내용 : 시간제 차량통행제한(기실시), 보행친화형 포장(도막형, 스탬프식 포장), 교통안전시설 보강, 옐로카펫 설치, 과속경보시스템 설치 등

▸ 규  모 : 도막형 포장 1,684㎡, 미끄럼방지포장 600㎡ 등

▸ 사업비 : 100백만원(구비)

▸ 사업기간 : 2018. 4. ~ 2018. 9.

ㅇ(우수사례) 통학로 이면도로 속도하향

▸ 사업대상: 관내 어린이 보호구역 주변

▸ 규 모: 어린이 보호구역 인근 통학로 중 이면도로 일정 구역

▸ 대상학교 : 천동초등학교

▸ 대상도로 및 구간 : 천호동 49-4 일대, 면적 약 174,300㎡

▸ 사업내용 : 어린이 보호구역 외 주변 인근 통학로 차량통행속도

30km/h 제한 및 보행로 확보 등

▸ 사업비 : 20백만원(구비)

▸ 사업기간 : 2018. 7. ~ 2018. 12.

특수시책 관련사진	우수사례 관련사진

증빙자료

ㅇ특수시책 및 우수사례 관련 자료

평가항목

4-4 홍보실적

배점

5

평점

5

평가방법

ㅇ(평가내용) 신문, 방송 등 홍보실적

ㅇ(평점방법)

구분	배점(점)
5회 이상	5
3회~4회	3
1회~3회	2
1회 미만	0

추진실적

ㅇ(홍보실적)

구분	언론사(일자)	세부내용
보도자료	메디컬투데이 등(18.2.6)	□2018년 신학기 어린이 보호구역 교통안전시설물 일제점검
보도자료	뉴시스 등 (18.7.13)	□강동 자전거 정비교실 수강생 모집
보도자료	한강타임즈 등 (18.8.7.)	□교통안전교육 및 교통안전용품 배부 (어르신 보행안전 개선)
보도자료	업코리아 등 (18.11.6)	□한산초등학교 통학로 교안전교통환경 조성 (한산초 스쿨존 보행안심 특화거리 조성, 보행자 방호울타리 공사, 태양광 과속경보시스템, 옐로카펫 설치 등)
보도자료	아시아경제 등 (18.11.16)	□옐로카펫 설치 (관내 4개소 옐로카펫 설치 완료)
보도자료	아시아경제 등 (18.11.21)	□암사길 이면도로 보행환경개선 (차량통행속도 30km/h 등)

증빙자료

ㅇ보도자료, 신문기사, 방송화면 등 증빙자료

붙임		자체평가보고서 증빙자료 목록
구분	증빙자료 목록
2-1	① 관련공문 및 집행실적
2-2	① 세출예산서(2018년)
2-3	① 주민설명회 결과보고, 유관기관 협의문서 등
3-2	① 어린이보호구역 상하반기 현장점검 관련공문
	② 한산초 통학로 개선 결과보고서
4-2	① 관련사진 등
4-3	① 특수시책 관련 자료
4-4	① 기사 캡쳐자료