강북삼거리 교통통제(부분차단) 계획

2014년 10월

	서 울 특 별 시
	도 시 기 반 시 설 본 부

강북삼거리 교통통제(부분차단) 계획

□ 개 요

구리암사대교 강변북로 교통처리(총 4단계) 중 2단계가 종료되어, 강변북로 종단선형이 상향되는 교통처리 3,4단계를 위해 강북삼거리를 부분차단(토평IC방면, 워커힐방면)해야 하는 실정이며, 이에 따라 기존 강북삼거리 이용 시민에게 우회도로를 안내하여 불편을 최소화 하기 위함.

※국도43호선 → 강변북로(서울방면) 노선은 이용 가능

□ 위 치 도

□ 강북삼거리 부분차단 추진일정

① 2014년 10월 06일 : 강북삼거리 부분차단 협의 (구리경찰서 및 구리시)

② 2014년 10월 14일~17일 : 강북삼거리 부분차단 홍보 (현수막, 안내간판 및 교통방송)

③ 2014년 10월 18일 : 강북삼거리 부분차단 (교통처리 3,4단계 시행)

□ 강북삼거리 부분차단 홍보계획

① 서울시 : 교통방송/ 언롱홍보실시 및 구리암사대교 인근 관할구청 (광진구 및 중랑구) 협조요청 (교통통제 전일 및 당일 2일간 홍보)

② 구리시 : 구리시 관내지역 홍보 (아파트 및 관할기관 : 동사무소, 도서관 등)

홍보 전단지 배포 및 구리넷 인터넷 신문사 (031-554-9240) 강북삼거리 차단홍보 기사 협조 요청

③ 시공사 : 우회차로 노선안내 표지판 설치 (32ea)

강북삼거리 부분차단 계획 알림 현수막 설치(30ea)

※ ①~③ 첨부내용 참조

첨     부 ①

교통방송 보도자료

강변북로 강북삼거리 부분차단 교통 통제계획

○ 공 사 명 : 구리암사대교 건설공사

○ 목    적 : 구리암사대교 아천IC 강변북로 교통처리 단계 시행을 위한 강북삼거리 차선차단에 따른 통행차량의 안전 확보를 위하여 강북삼거리에 대하여 교통통제 시행

○ 작업내용 : 강북삼거리 부분차단

공사 시행	일 시	2014년10월21일 ~ 11월17일 (32 일간)
	장 소	구리암사대교 북단 - 강변북로 강북삼거리
공 사 기 간		2014.10.21.(화) ~ 11.17.(월)
공 사 및 통제방법		강변북로 강북삼거리 워커힐, 아천동 방면 차단 강북삼거리 토평IC, 양평, 덕소 방면 차단 아치울삼거리 서울방향 정상통행 시행시간 : 10:00 양방향 동시차단
기 타 사 항		․ 차선 변경, PE드럼 및 라바콘 설치

○ 유관기관 협의 : 구리경찰서 교통과

○ 교통통제 중 홍보 및 안전대책

구 분	종 류	설 치 위 치
교 통 통 제 (천호 방향)	공사안내간판	․ 통제지점 100/300/600m, 1/1.5/2/4km전 설치
	샤인보드(사인카)	․ 통제지점 0.5km 전방부터 2개소 설치
	신 호 수	․ 교통통제 신호수 2명 배치

○ 서울시도시기반시설본부 토목부 : 조양연 (*************, 3708-2557)

○ 시 공 사(현대건설(주)) : 방극정(*************) 옥영기 (*************, 442-1502)

○ 감 리 단((주)제일엔지니어링) : 윤한유(*************, 3427-5013)

첨     부 ②

홍보자료

예시)

구리암사대교 강변북로 강북삼거리 부분차단 계획

○ 강북삼거리 (2014년10월21일~11월17일)

㉠ 강북삼거리 차단

- 토평IC → 서울(워커힐), 아천동 방면 차단

- 아치울삼거리 → 토평IC, 양평, 덕소 방면 차단

㉡ 강북삼거리 부분통행

- 아치울 삼거리 → 서울방면 정상통행

첨     부 ③

- 교통표지판 및 현수막 내용

`

구분	아치울삼거리	국도43호선(1)	국도43호선(1)	비고
문양	①	②	③
수량	예고3EA(1km,500m,300m), 본표지 1EA 배너광고 5개소	예고3EA(1km,500m,300m), 본표지 1EA 배너광고 5개소	예고3EA(1km,500m,300m), 본표지 1EA
방향	구리방면	서울방면	구리방면
구분	장자대로	벌말로	토평삼거리	비고
문양	④	⑤	⑥
수량	예고3EA(1km,500m,300m), 본표지 1EA	예고3EA(1km,500m,300m), 본표지 1EA	예고2EA(1km,500m), 본표지 2EA
방향	구리방면	토평IC방면	서울방면

구리암사대교 공사로 인한 “ 차 량 부 분 차 단 ”

○일시 : 2014년 10월 21일부터  ○구간 : 강북삼거리 ~ 아치울삼거리(워커힐, 토평IC)

- 교통표지판 설치위치

2

3

4

5

6

1

- 현수막 설치위치