강북정수장 고도정수시설 2차 연결공사 추진계획

□ 강북정수장 고도정수시설 2차 연결공사 추진일정표

일 자 추진사항 등	4.28(월)	4.29(화)	4.30(수)
추진사항	연결공사 준비	연결공사 추진 4. 29 11:00 ~ 24:00 (13시간)	수계환원
강북	정상 운영	생산량 감소 50만톤/일	연결공사 종료 후 생산량 환원
구의	수계전환 관련 강북지원 1만톤/일 (5.15일까지 계속)
암사	수계전환 관련 강북(구의)지원 6만톤/일 (5.15일까지 계속)
강북 관련 배수지 (6개소) 공릉, 월계, 월곡 북악, 불광, 백련	최대수위 확보 준비	최대수위 확보 및 연결공사 중 유입량 조절	정상운영
타 정수장 배수지 (구의, 암사 계통)	정상 운영	최대수위 확보	정상운영
시계외 급수지역 (구리, 남양주시)	정상 운영	관련 배수지 (강북, 지금, 별내) 최대수위 확보	정상운영

□ 2차 연결공사 중 강북수계 관련배수지 급수운영

(단위 : 천㎥/일)

구분	배수지명	시설규모	배수지 운영
계		595
1	공릉	170	연결공사(4.29(화) 11:00~24:00) 중 유입량 60%로 조절운영
2	월계	100	연결공사(4.29(화) 11:00~24:00) 중 유입량 60%로 조절운영
3	월곡	50	정상운영
4	북악	145	정상운영
5	불광	90	연결공사(4.29(화) 11:00~24:00) 중 13시간 유입 중단
6	백련	40	연결공사(4.29(화) 11:00~24:00) 중 유입량 60%로 조절운영