BSC에 기반한 2013년도 성과관리계획

주요사업 추진결과 보고서

(4/4분기)

‘13년 성과 관리계획 (핵심)사업명	강북아리수정수센터 시설 개선 (BSC - 33)				담당		소속			강북아리수정수센터
							성명			윤걸
							전화			3146-5880
시장 공약사항	❈
시정운영중장기계획	❈
시장 지시사항	❈
1. 사업개요	○ 사업목적 - 정수센터의 노후된 시설물을 개선하여 고장율 최소화 및 운영효율을 향상하고 시설물의 내구성 증진 및 안전성 확보를 도모하고자 강북통합취수장 피뢰침 설비공사, 강북통합취수장 와류방지판 설치, 분전반 제작구매 설치, 탈수기동 감시제어반 교체, 여과지 유입 및 퇴수밸브 개량사업을 시행하고자 함. ○ 사업내용 - 강북통합취수장 피뢰침 설비공사 : 피뢰침, 접지설비, 써지보호 장치 설치 - 강북통합취수장 와류방지관 설치(22개소) - 분전반 제작구매 (18면) - 탈수기동 감시제어반 설치(1식) - 여과지 유입 및 퇴수밸브 개량(밸브교체 39식) ○ 사업기간 : ‘13. 1 ~ 12월
	사업종료년도의 최종목표치
	실 시 근 거
2. 사업비 (백만원)	연도별 사업비	총사업비	2010년			2011년			2012년		2013년
											1,475
	예산 집행실적 및 향후전망	구 분	1/4분기			2/4분기			3/4분기		4/4분기
		계 획	452			321			550		152
		집 행	452			321			550		152
		집행 실적 저조 사유	-
		향후 전망	계획에 의거 시행 완료
3. 지표 및 세부사업 추진 실적
구 분		'13년 목표		4/4분기 목표				실적
❈ 정수장 시설 개선수		5건		5건				5건

4. 분기별 주요 추 진 사 항 (주요 방침)	1/4분기	① 강북통합취수장 피뢰침 설비공사 - 설계도서 작성 : 3. 15 ② 강북통합취수장 와류방지판 설치 - 설계도서 작성 : 3. 15 ③ 분전반 제작구매 설치 - 발주 : 2. 8 - 계약 : 3. 14 - 착공 : 3. 14 ④ 탈수기동 감시제어반 교체 - 설계도서 작성 : 1. 22일 - 심사의뢰 : 2. 28일 - 계약의뢰 : 3. 13일 ⑤ 여과지 유입 및 퇴수밸브 개량 - 계약의뢰 : 2. 5 - 물품구매 : 3.13 - 착공 : 3. 21
	2/4분기	① 강북통합취수장 피뢰침 설비공사 - 발주 : 4. 4 - 계약 : 4. 22 - 준공 : 5. 20 ② 강북통합취수장 와류방지판 설치 - 설계도서 작성 : 3. 15 ③ 분전반 제작구매 설치 - 발주 : 2. 8 - 착공 : 3. 14 - 준공 : 4. 25 ④ 탈수기동 감시제어반 교체 - 발주 : 3. 13 - 착공 : 5. 3 ⑤ 여과지 유입 및 퇴수밸브 개량 - 발주 : 2. 5 - 착공 : 3. 20 - 준공 : 6. 18
	3/4분기	① 강북통합취수장 피뢰침 설비공사 - 발주 : 4. 4 - 계약 : 4. 22 - 준공 : 5. 20 ② 강북통합취수장 와류방지판 설치 - 발주 : 9. 17 ③ 분전반 제작구매 설치 - 발주 : 2. 8 - 착공 : 3. 14 - 준공 : 4. 25 ④ 탈수기동 감시제어반 교체 - 발주 : 3. 13 - 착공 : 5. 3 - 준공 : 9. 27 ⑤ 여과지 유입 및 퇴수밸브 개량 - 발주 : 2. 5 - 착공 : 3. 20 - 준공 : 6. 18

4. 분기별 주요 추 진 사 항 (주요 방침)		4/4분기	① 강북통합취수장 피뢰침 설비공사 - 발주 : 4. 4 - 계약 : 4. 22 - 준공 : 5. 20 ② 강북통합취수장 와류방지판 설치 - 발주 : 9. 17 - 착공 : 10.11 - 준공 : 12. 9 ③ 분전반 제작구매 설치 - 발주 : 2. 8 - 착공 : 3. 14 - 준공 : 4. 25 ④ 탈수기동 감시제어반 교체 - 발주 : 3. 13 - 착공 : 5. 3 - 준공 : 9. 27 ⑤ 여과지 유입 및 퇴수밸브 개량 - 발주 : 2. 5 - 착공 : 3. 20 - 준공 : 6. 18
5. 검토 및 개선사항			○ 정상 추진 완료
6. 향 후 계 획			○ 계획에 의거 시행 완료
7. 평가결과 전 분 기 지적사항 및 조치사항	구 분		지적사항	조치사항
	1/4 분기
	2/4 분기
	3/4 분기
	4/4 분기