◆ 자연과 인간의 공간창조 기업 도화 ◆
	(주) 도 화 엔 지 니 어 링 Dohwa Engineering Co.,LTD.

우편 : 서울특별시 강동구 선사로 185-118(암사동)    / 홈페이지 www.dohwa.co.kr

전화 (02)3427-5013 / 전송 (02)3427-5013         / 담당 김윤호  k67youn@naver.com

선결			지시
접수	일자 시간		결 재 • 공 람
	번호
처리과
담당자

문서번호 : 고덕감리 2014-461호

시행일자 : 2014. 10. 27.

수    신 : 도시기반시설본부장

참    조 : 토목부장

제   목 : 강일삼거리 부대공 실정보고

1. 귀 본부의 협조에 항상 감사드립니다.

2. 신성암사 제2014-415호(2014.10.06.)와 관련입니다.

3. 구리암사대교연결도로건설공사 구간인 강일삼거리 우수암거설치 공사를 위해 도로공사 신고허가 시 관할 강동경찰서 허가조건인 교통전문 신호수 배치와 우수암거 공사로 인해 저촉되었던 기존시설물의 원상복구에 대해 별첨과 같이 검토하여 실정보고하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 검토의견서 1부. 끝.

암사대교건설공사 외1건

통합전면책임감리용역

책임감리원 우 재 경

㈜도화엔지니어링 ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소	감 리 검 토 의 견 서	2014. 10.
검 토 건 명	강일삼거리 부대공(교통신호수 반영 등)	작성자 : 김윤호
관 련 근 거	신성암사 제2014-415호 (2014. 10. 06)

1. 개요

강일삼거리 우수암거설치 공사를 위해 도로공사 신고허가 시 관할 강동경찰서 허가조건인 교통전문 신호수 배치와 우수암거 공사로 인해 저촉되었던 기존시설물의 원상복구에 대해 실정 보고된 사항에 대하여 검토함.

2. 강일삼거리 공사현황

고덕교

고덕차량기지

고

덕

천

선사로확장공사

우수 BOX

L=326m, 1.5×1.5

교통신호수

배치위치

교통신호수

배치위치

고덕천

고덕천 하부

우수암거

산책로

우수 BOX

1.5×1.5

기존 우수암거에 신설암거 연결부

3차공사

1차공사

2차공사

호안블럭 원상복구

(변경없음)

사면보호

콘크리트기초

(추가설치)

2. 시공사 요청내용

가. 교통신호수 및 보행자도우미 배치

〇 교통신호수 배치

도로공사 신고허가 시 관할 강동경찰서 허가조건인 교통전문 신호수 2~3인 배          치 조건으로 승인되어 공사기간동안 실 투입된 인원 반영 요구.

〇 보행자도우미 배치

구 분	당초 공사일수	실제 공사일수	비고
공사기간	‘14. 04. 16∼’14. 06. 06	‘14. 04. 24 ~ ’14. 09. 06
공사일수	52일	136일	증 84일

우수암거공사 구간에 각종 지하매설물이 산재되어 있어 불가피하게 계획보다             공사기간이 추가로 소요되었으므로 실 투입기간 반영요청.

나. 기존 우수암거 보호 차수매트 설치

〇 고덕천 기존 우수암거에 신설 우수암거를 연결하기 위해 기존관로 보호 차수매            트가 훼손되어 원상복구 조치필요.

다. 보도와 자전거도로 분리 차선도색

〇 보도부에 우수암거를 시공하였으나 관할청인 강동구청과 협의결과 보도부에             아스콘으로 포장하고 보도와 자전거도로를 구분하여 통행로를 조성하기 위해            차선도색 시행.

3. 검토 결론

가. 교통신호수 및 보행자도우미는 공사 시 통행차량 안전을 위한 강동경찰서의 허가        조건과 보행자 안전을 위해 반영함이 타당한 것으로 사료 됨.

나. 배치기간 적용

실지 공사시행 기간이 당초 계획 보다 길어 졌으나, 시공사 귀책사유로 판단되므        로 당초 계획 공정상의 공사일수(52일)만 반영함이 타당한 것으로 사료 됨.

다. 단가 적용

실적공사비 가능공종을 우선 적용하고, 신규공종은 표준품셈에 의한 낙찰율 적용

라. 관급자재(레미콘)

고덕천 사면 원상복구시 호안블럭 하부에 토사유실을 위한 토목섬유(부직포)만         설계 되어 있으나 관계기관 하천점검시(2014.5) 호안보호를 위하여 추가로 콘크        리트 기초 설치 요청에 의하여 관급자재 반영함은 타당한 것으로 사료됨.

마.  수량 및 공사비 현황                                         (단위 : 천원)

구 분	단위	수 량		금 액				비 고
		당초	변경	당 초	변 경	증 · 감
1.보행자도우미	인	30	49	4,408	7,199	증	2,791
2.차수매트 설치	㎡	-	32	-	509	증	509
3.차선도색	㎡	-	54	-	780	증	780
직접 공사비				4,408	8,488	증	4,080
간접 공사비				2,101	3,670	증	1,569
4.교통신호수	hr	-	980	-	16,660	증	16,660
공 급 가 액				6,455	28,818	증	22,363
부가가치세				645	2,882	증	2,237
도 급 액				7,100	31,700	증	24,600
5.관급자재 (레미콘)				815	1,486	증	671
공 사 비				7,915	33,186	증	25,271

붙임 : 1) 시공사 실정보고 (신성암사 제2014-415호, 2014. 10. 06)

:      2) 도로공사 신고서

3) 공정표 (공사 예정공정표)

확인자 : 책임감리원  우 재 경 (인)