도로함몰 예방 노후 하수관로 정비사업 (계속사업)	물순환안전국
	물재생계획과

회계구분		특별회계			□ 신규 ■ 계속
					□ 경상 ■ 투자
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업개요

○ 사업근거

- 하수도법 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)

- 2030 하수도정비 기본계획

○ 위    치 : 25개구

○ 규    모 : 하수관로 정비 308km(‘19년 81km)

○ 사업내용 : 노후, 불량 하수관로 정비

- 30년 이상 노후 하수관로 실태조사 결과 긴급보수 대상 하수관로 정비 308km 정비

○ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2020. 12.(‘19년 사업 : ’19.1.~‘19.12.)

○ 총사업비 : 459,598백만 원(‘19년 예산 133,400백만 원)

○ 추진일정(추진경위)

- 2015. 2. 14.      : 노후불량하수관로 종합실태 조사·설계 추진 방침(부시장)

- 2015. 7. ~ ‘18. 6 : 1차~3차 조사용역 완료

- 2017. 3. ~ 12.    : ‘17년 정비공사 완료

- 2018. 3. ~        : ‘18년 정비공사 추진 중

- 2018. 6. ~        : 4차 조사용역 추진 중

○ 연차별 투자계획

(단위: 백만원)

합계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후	비고
(x103,057) 459,598	(x30,957) 83,898	(x39,100) 126,300	(x-) 133,400	(x33,000) 116,000

○ 최근4년 결산현황

(단위 : 천원)

연도별	예산액 (A)	전년이월(B)		이‧전용‧변경 (C)	예산현액 (D=A+B+C)	지출액 (E)	다음연도이월(F)		집행잔액 (D-E-F)
		명시이월	사고이월				명시이월	사고이월
2016	31,500,000				31,500,000		31,500,000
2017	99,100,000	31,500,000			130,600,000	83,897,845			46,702,155
2018.10	126,300,000				126,300,000	13,937,083	48,172,000

□ 예산(안) 요구내역

(단위 : 천원)

통계목	2017년 예산액	2018년 예산액	2019년 예산(안)	증감	산출내역
시설비	130,600,000	126,300,000	133,400,000	증)7,100,000	- 하수관로 정비 81km*1,646,913,580원 = 133,400,000천원