측정기 개선완료 보고

□ 시설명 : 서울시 중랑물재생센터 공공하수처리시설

□ 개선내역 : PH/SS/COD/TN/TP측정기 교체

전송장비(데이터로거)교체

□ 개선기간 : 17. 8. 28(09:00) ~ 10. 31(18:00)

□ 개선 진행사항 내역

내 용	일 정	비 고
PH/SS/COD/TN/TP 측정기 교체	17.08.28 ~ 17.09.17	측정기 5개 항목(교체) 전송장비 교체
전송장비 교체
최초 정도검사 진행	17.09.18 ~ 17.09.20	한국산업기술시험원
정도검사 적합결과서 취득	17.10.26
측정기 및 전송장비 시운전 및 최종 점검	17.09.21~17.10. 31	측정 및 전송부분

사  진  대  지(1방류구)

현장명	서울시 중랑 공공하수처리시설	일자	17. 09. 04.
사진설명	PH/SS/COD/TN/TP측정기/전송장비 교체전(1방류구)
현장명	서울시 중랑 공공하수처리시설	일자	17. 09. 04.
사진설명	PH/SS측정기 교체후(1방류구)

사  진  대  지(1방류구)

현장명	서울시 중랑 공공하수처리시설	일자	17. 09. 04.
사진설명	COD/TN/TP측정기/전송장비 교체후(1방류구)

사  진  대  지(2방류구)

현장명	서울시 중랑 공공하수처리시설	일자	17. 09. 05.
사진설명	PH/SS/COD/TN/TP측정기/전송장비 교체전(2방류구)
현장명	서울시 중랑 공공하수처리시설	일자	17. 09. 05.
사진설명	PH/SS 교체후(2방류구)

사  진  대  지(2방류구)

현장명	서울시 중랑 공공하수처리시설	일자	17. 09. 05.
사진설명	COD/TN/TP측정기/전송장비 교체후(2방류구)