<서식 3>

2018 회계연도 건설개량이월 요구서

[부서명: ◯◯◯과]                                                                                                   (단위: 천원, ’18.12.31.기준)

사 업 명 (사업코드)	예 산 과 목				예산현액 (A)	지출액 (B)	건설개량 이 월 액 (C)	사 고 이월액 (D)	불용액 (A-B-C-D)	이 월 사 유	유형별	완공예정 연월일
	관	항	세항	목 (세목)
수색동308일대 노후하수관로개량공사 ( )	자본적지출 (200)	유형자산취득 (230)	구축물 (234)	시설비 및 부대비 (401-01)	1,000,000	171,800	656,400	171,800	0	◦ Fast Track 방식으로 설계비와 더불어 공사비를 편성하였으나 월류수대책 수립을 위한 기존관로 상태불량으로 설계지연 ◦실시설계를 위한 시험시공 등 설계완료이전 소요되는 비용확보 및 설계 후 조속한 사업 완료를 위하여 이월	①시설공사	2020년

※ 1. 예산현액과 이월액 및 불용액의 합계는 일치하여야 하며, 국고보조금 이월액은 (   )로 별도 기재

2. 사업코드는 6자리{예: 도로함몰예방 노후 하수관로 정비 (000013)} 표기하고 목(세목)명은 예산과목 란에 기재

3. 건설개량이월은 자본예산만 가능(사업예산은 이월대상이 아님)하며, 재차 건설개량이월은 불가하나 사고이월은 가능함.