건 설 기 술 심 의 요 청 서

안건번호	제 호
구 분	용역발주심의

건 명	한남2고가 및 구로고가차도 철거공사 실시설계 용역

요청기관	서울시 도시기반시설본부 토목부
제출연월일	2017년 1월 일

건설기술용역 발주계획서

1. 용 역 개 요

가. 용 역 명 : 한남2고가 및 구로고가차도 철거공사 실시설계 용역

나. 사업규모 : 한남2고가 및 구로고가차도 철거 2개소

- 한남2고가 철거 : 폭 15m,   연장 341m

- 구로고가 철거  : 폭 18.5m,  연장 531m

다. 용역기간 : 2017. 3 ~ 2017. 10 (210일)

라. 용 역 비 : 428백만원

2. 추진현황

○ ´09.12.14 : 고가차도 철거 세부추진계획 수립(행정2부시장 방침)
○ ´14.10.   : 고가차도 철거 등 방안 검토(시장요청사항-3회)

○ ´15.06.~´16.09. : 「고가차도 관리계획 수립 용역」시행

○ ´16.08.11 : 서울시 고가차도 철거 등 관리계획(안) 보고(2부시장 방침 제266호)

3. 용역의 필요성

가. 필요성

○ 대중교통 및 보행자 중심의 교통패러다임 변화와 철거요구 민원 등을 반영하여 수립한 우리시 고가차도 관리계획(안)에 따라 통행속도 감소율, 경제성 등의 철거효과가 높은 2개고가(한남2, 구로)를 철거하여 도시경관, 지역경제 활성화 및 지역 간 소통향상에 기여하는데 목적이 있음.

4. 과업의 내용

가. 과업의 기본방향

○ 고가차도 철거 및 공사시․철거후 교통관리 계획

나. 과업위치 및 규모

○ 과업 위치 : 한남2고가(용산구 한남동 707-327),

구로고가(구로구 가리봉동 139)

○ 과업 규모

- 한남2고가 철거 : 폭 15m,   연장 341m

- 구로고가 철거  : 폭 18.5m,  연장 531m

다. 주요 과업내용

○ 한남2 고가, 구로고가차도 철거 및 지장물 이설 재설치

○ 교통규제심의 및 교차로 교통개선방안 수립(한남2고가 및 구로고가)

- 공사장 주변 교통현황 및 영향분석

- 공사시행으로 인한 교통영향 분석, 문제점 및 개선방안

- 교차로 개선방안 및 공사중 교통처리계획

5. 발주방법

가. 발주방법 : 일반경쟁 입찰 (적격심사입찰)

나. 결정사유 및 근거

○ 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률제9조 시행령 제42조 규정

○ 지방자치단체 기술용역 적격심사 세부기준(행정자치부 예규 제69호(2016.11.14)

다. 대상업체

○ 엔지니어링 기술진흥법 제4조에 의한 엔지니어링 활동주체로서 건설부문중 토목구조, 도로및공항, 교통 분야의 엔지니어링 활동주체로 신고를 필한 업체로써

- 측량법제39조의 규정에 의한 일반측량업 등록업체

- 전력기술관리법 제11조, 제14조 및 같은법시행규칙 제25조 규정에 의한 전력시설물 종합설계업 또는 전문설계업 1종에 등록된 업체

(공동이행방식에 의한 공동도급 가능)

6. 추진일정

○ 2017. 1 : 용역발주심의

○ 2017. 2 : 사업수행능력평가 및 업체선정

○ 2017. 3 : 용역계약 및 착수

○ 2017.10 : 공사발주 및 착수

따로붙임 :  과업내용서 1부.  끝.